문서번호	건축부-14348
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김현지		신명승	12/01 김우성
협 조

「2014년 운현궁 문화재 보수공사」

공사기간 조정 검토 보고

2014. 12.

도시기반시설본부

건  축  부

「2014년 운현궁 문화재 보수공사」

공사기간 조정 검토 보고

『2014년 운현궁 문화재 보수공사』관련 시공사로부터 제출된     공사기간 조정 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

○ 위    치 : 종로구 운니동 114-10번지 (사적 제257호)

○ 보수범위
- 수직사, 노안당, 노락당 북행각 흰개미 피해 및 부식부 보수
- 회랑 정문, 이로당 협문 부식부 보수 등

○ 공사기간 :	`14.10.06 ～ `14.12.04

○ 도 급 액 : 154,482천원

○ 시 공 사 : (주)창의건설

○ 공 정 률 : 수직사 및 북행각 노락당 해체(2%), 문화재청 설계변경 승인 협의 중

□ 추진경위

○ 2014.10.06 : 공사 착수

○ 2014.10.14. : 역사문화재과 정밀실측작업 협조 요청

- 2014.10.15. 이후 수직사 보수공사 요청

○ 2014.10.22 : 공사 일시중지 지시
- 문화재청 문화재기술지도 자문회의 개최 일정 지연
○ 2014.11.04 : 문화재기술지도 자문회의 개최

○ 2014.11.12 : 설계변경 실정보고 제출 지시

○ 2014.11.27 : 시공사 설계변경 실정보고 제출

○ 2014.11.28 : 문화재청 설계변경 승인 요청(건축부→문화재청 수리기술과)

○ 2014.12.01 : 시공사 준공기한 연기요청

□ 공사기간 조정내용

○ 조정사유

사 유	일 정	일수	비고 (문서번호)
역사문화재과 - 운현궁 정밀실측조사 업무협조 요청 : 2014.10.15. 이후 수직사 공사가림막 설치	`14.10.6~`14.10.15	10	건축부 -12042
문화재 기술지도 자문회의 개최일정(`14.11.4)에 따른 공사 일시중지 지시	`14.10.23~`14.11.2	11	건축부 -12612
기술지도 자문결과에 따른 설계변경 지시 : 문화재청 설계변경 승인 행정기간 소요	`14.11.12~`14.12.4	23	건축부 -13532
공사품질확보를 위해 공사불능일수(동절기) 제외	`15.1.1~`15.2.28	59
조정(연장)일수 합계	103일

○ 공사기간 조정 내역

구분	당 초	변 경	증․감	비고
총차	`14.10.6~`14.12.4	`14.10.6~`15.3.17	증 103일

○ 연기귀책사유 : 서울시

□ 검토 및 처리의견

○ 역사문화재과 업무 협조요청으로 착수일 지연, 문화재청 협의기간 소요 및 동절기 도래로 인한 공사불능일 제외 등으로 인한 공사기간 조정 (103일연장) 요청은 양호한 공사품질 확보를 위해 적정하다고 검토되어, 공사기간 연장처리 하고자 함.

붙 임  1. 공기연장 요청 공문(시공사) 1부.
2. 수정예정공정표 1부.  끝.