투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경자문소위원회 자문 요청(남부순환로~오정대로)

남부순환로~오정대로간 도로개설공사의 실정보고 건에 대하여 설계변경자문소위원회에 상정하여 자문 결과를 설계에 반영하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 남부순환로~오정대로간 도로개설공사

2. 공사규모 : 도로개설 폭 40m(8차로), 연장 1.23km

3. 공사기간 : 2009. 9.29. ~ 2015.12.30.

4. 설계변경자문 소위원회 상정 내용 : 설계도서 검토 등 3건

연번	공 사 명	자 문 내 용	공 사 비 (천원)			비고
			당 초	변 경	증·감
1	남부순환로~오정대로간 도로개설공사	설계도서 검토 결과 반영	5,691,222	6,058,440	367,218
2		경계석 및 측구 형식 변경 반영	521,760	606,270	84,510
3		기존 수로구간 퇴적지반 처리	-	33,690	33,690

붙  임 : 소위원회 심의 요청서 3부.  끝.

주무관	정문수		광역도로과장	최광무		토목부장	12/01 노우성
협조자	주무관	박웅교
시행	토목부-23654	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 2동3층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개