문서번호	방재시설부-12504
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	12/01 代서관석
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

건축물사전사후 안전점검 실시에 따른 검토보고

2014. 12

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

건축물사전.사후 안전점검 실시에 따른 검토보고

공릉2빗물펌프장 신설공사와 관련하여 공사장과 인접된 건축물에 대하여 사전.사후 안전점검을 실시하고자 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토보고임.

추진근거

❍ 공사실정보고(건축물 사전.사후 안전점검)

- 공사감독2처-20244(2014.11.25.)

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,541백만원

실정보고내용

❍ 공사장주변 건축물 사전사후 안전점검실시

- 공릉2빗물펌프장 건설에 따른 주변 건축물이 인접되어 있고 가시설 등 공사시    진동발생 및 지상에서 11.9m 굴착(지하수위 아래 5m 굴착)함에 따라

공사장주변 건축물의 영향을 사전 및 사후점검하여 이상발견시 사전에 대책을    수립하고자 함

․ 공사장주변 건축물 현황(사전,사후 안전점검 대상건축물)

연번	위 치	구 조	현장이격 거리(m)
1	공릉동 404-1	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	17.6
2	공릉동 404-8	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	15.6
3	공릉동 404-19	철근콘크리트 (지하-층 지상5층)	12.5
4	공릉동 404-22	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	12.5
5	공릉동 404-24	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	13.7
6	공릉동 404-10	철근콘크리트 (지하1층 지상4층)	20.0

․ 위치도 및 현장사진

위 치 도	공릉동 404-1
공릉동 404-8	공릉동 404-19

․ 소요공사비 : 18,833천원

항 목	(주)대웅컨설턴트	가온엔지니어링	비 고
건축물안전점검 (사전ㆍ사후)	20,000,000원	20,950,000원
부가세	2,000,000원	2,095,000원
소 계	22,000,000원	23,045,000원
낙착율적용 (85.609%)	18,833,000원	19,728,000원
적 용	18,833,000원	※ 천단위 이하 절삭

감리검토내용

❍ 상기와 같이 공릉2빗물펌프장 굴착주변 건축물(6동)에 대한 건축물 사전,사후 안전점검을 시행하여 균열 및 침하 등 이상징후를 사전에 점검하여 안전성을 확보함이 타당하다고 사료됨

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 사전.사후 정밀검사 대상건물 현황 1부. 끝.