문서번호	토목부-23685
결재일자	2014.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	12/01 노우성
협조
	주무관		양준식

본선고가교(BR1) 보완설계에 따른 설계변경 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

본선고가교(BR1) 보완설계에 따른 설계변경 검토보고

【강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사】

본선 고가교(BR1) 보완설계에 따른 부재 규격 변경으로 강재의 수량이 변경되어 이에 대한 검토 보고임.

관련근거

❍ 토목부-14667호(`14.17.29.) 사전설계검토에 대한 검토결과 제출 요청

❍ 동기강 2014-278호(`14.10.29.) 본선고가교(BR1) 보완설계 승인 보고

공사개요

❍ 공 사 명 : 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사

❍ 공사규모 : 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량 2개소, 지하차도 4개소)

❍ 공 사 비 : 222,995백만원 (8차: 12,480백만원)

❍ 공사기간 : 2002. 7. 3. ~ 2018. 7. 31.(8차 `14.10.1.~`15.8.31.)

❍ 시 공 사 : 롯데건설(주) 외 1

❍ 감  리  사 : ㈜동명기술공단

감리단 보고 내용

❍ 주요 변경 내용

- (부재 전면 재검토에 따른 수량변경 등) 구조계산 보완에 따른 부재 전면 재검토로 가로보 규격 변경(H=1.4m → 2.0m, Flange T=10mm→22mm) 등에 따른 수량 변경 및 BOLT의 규격 변경(F10T→F13T) 및 강교도장 수량 변경.

당 초	변 경
Cross Beam(CR01) H=1.4m, T=10mm	Cross Beam(CR01) H=2.0m, T=22mm

- (거더의 분절 연결 계획 변경) 당초 거더 1개 분절(Segment, 운반 단위블록)의 최대중량은 37.242ton/Seg으로 도로교통법상 법적 한계 운송 최대하중 범위(40ton, 차량+화물)를 상회하여 운송이 불가능하므로 운송이 가능한 범위로 분절길이를 조정함으로써 분절계획 변경 및 SPLICE 수량 증가 반영.

당 초	변 경

- (비파괴검사 수량 변경) 당초 비파괴검사 RT의 경우 수량산출이 필름의 전길이인 30cm로 계획되어 있어 이를 정정하여 유효길이인 25cm로 변경하여 적용하였으며 RT 및 MT, UT의 수량에 대해 도로교표준시방서(2013)와 당초 설계상 용접시험계획에 적합하도록 수량 변경.

당 초	변 경
RT 필름 전길이(30cm/매) 적용	RT 필름 유효길이(25cm/매) 적용 기타 비파괴검사 수량 정정

❍ 수량 변경 증･감

공 종		단위	당 초	변 경	증･감
강교제작, 운반, 설치		톤	2,545.656	2,606.897	61.241
도장	교량 외부(공장)	M2	14,446	14,338	감) 108
	교량 외부(현장)	M2	13,201	12,940	감) 261
	교량 내부(공장)	M2	19,438	20,120	682
	연결판(공장)	M2	4,840	5,671	831
	외부볼트 및 연결판(현장)	M2	1,479	1,640	161
	내부볼트 및 연결판(현장)	M2	821	1,064	243
	외부 포장면(공장)	M2	3,894	3,863	감) 31
	강교내부볼트(공장)	톤	85.205	84.453	감) 0.752
비파괴 검사	방사선투과(RT)	매	192	1,152	960
	자분탐상(MT)	M	2,737	3,242	505
	초음파탐상(UT)	M	1,338	1,231	감) 107

❍ 공사비 증･감 비교 현황

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증･감	비 고
구조물공	강교 제작및설치	4,546,847	4,656,231	109,384
	강교 도장	615,809	630,682	14,873
	강교 비파괴검사	43,604	55,747	12,143
직접공사비		5,206,260	5,342,660	136,400
간접공사비		1,219,195	1,254,613	35,418
공급가액		6,425,455	6,597,273	171,818
V.A.T		642,545	659,727	17,182
총공사비		7,068,000	7,257,000	189,000

조치계획

❍ 감리단 검토의견에 따라 승인통보하고 우리본부 설계변경 소(본부)위원회 심의를 거쳐 설계변경 시 반영토록 조치코자 함.

붙  임 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.