문서번호	한양도성도감-11080
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장	문화체육정책관		문화관광디자인본부장
박민상	신추교	심말숙	양현미		12/02 이창학
협 조

한양도성 남산·낙산 구간

탐방로(순성길) 정비 공사 완료 보고

2014.12.01

문화관광디자인본부

(한양도성도감)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	문화재보호법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	문화재청	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

한양도성 남산․낙산 구간

탐방로(순성길) 정비 공사 완료 보고

「한양도성 남산․낙산 탐방로 정비 공사」를 완료하고 다음과 같이 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공사기간 : ‘13. 12. 26 ~ ‘14. 11. 27

□ 위    치 : 한양도성 남산․낙산 구간 700m

□ 공사내용

○ 남산체육회 야외체육시설 및 팔각정 배드민턴장 등 철거 후 탐방로 조성(600m)

○ 낙산 배드민턴장 주변 시설 정비 후 전망대 및 탐방로 조성(100m)

□ 소요예산 : 576백만원(국/시비)

□ 시행방법

○ 시행 계획(방침) 수립 및 한양도성자문회의 자문 : 한양도성도감과

○ 설계용역 및 공사 시행 : 중부공원녹지사업소

Ⅱ		추진경위

□ ‘13.  8 : 시행 방침 수립(부시장방침 제346호)

□ ‘13. 11 : 한양도성자문위원회 자문(2회)

□ ‘13. 12 : 설계용역 완료 및 공사착공(‘13.12.26)

□ ‘13. 12 ~ ‘14. 9 : 남산체육회 및 팔각정 배드민턴협회 등 철거․이전 협의

□ ‘14. 10 : 남산체육회 야외체육시설 등 철거 완료

□ ‘14. 11 : 공사 완료(‘14.11.27)

Ⅲ		향후일정

□ ‘14. 12 ~ ’15. 5 : 인왕산 및 백악산 구간 기존 탐방로 정비 공사 계약 및 시행

붙 임 : 현황사진 1부. 끝.