문서번호	조경과-2033
결재일자	2013.4.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
이옥하	이성주	정경효		04/15 이원효
협 조
	동물원장		노정래
	총무과장		이경로
	시설과장		배병렬
	동물복지과장		이달주

소동물관 실무회의 결과보고(2,3차)

2013. 4

서울대공원

(조 경 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

-소동물관 소형동물 생태행동 전시장 조성-

실무회의 결과보고(2,3차)

소동물관 공사의 원활한 진행을 위해 실무자회의(2,3차)를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		2차 회의

회의개요

○ 일  시 : 2013. 3. 12(화) 14:00~16:00

○ 장  소 : 소동물관 현장 및 호랑이사 회의실

○ 참석자

- 실무위원(7인) : 이옥하, 서동민, 박수현, 김태극, 마동훈, 김효준, 한효동

- 시 공 사(2인) : 전도종합건설, 인영건설 현장대리인

○ 회의안건

- 공사 추진사항 및 공종계획 보고

- 현안사항 검토

회의내용 및 결과

○ 설계 오류 및 누락분 실정보고

- 방사장 동물출입문, 방사장 철망 철거, 건물입구 포장 및 화단철거 설계 누락

- 그릴 이중 반영(건축, 설비분야 내역에 포함)

- 관리자 출입문 규격, 재질, 수량 조정(현장 상황에 맞게)

⇒ 안전과 동물복지 측면에서 총공사비 범위내에서 가능한 설계변경하여 반영

○ 사육사 요청사항 검토

- 내실 천창 설치 : 일부라도 햇빛이 들 수 있도록 변경 요구

- 내실 바닥난방 설치 : 아픈 동물이나 출산동물의 건강관리를 위해 필요

- 외부전시장 벽체에 환기를 위한 구멍 설치 : 여름철 열섬효과 예방

- 방사장내 우수는 동물들의 배설물로 오염되므로 오수로 처리 : 환경단체 등 민원 대처

⇒ 예산범위 내에서 가능한 반영토록 검토

○ 급수관 연장 검토

- 호랑이사 급수관 교체시 표범사~소동물관 입구까지 급수관 교체 계획 없어 소동물관 급수 이용에 문제가 생기므로 대책 검토(호랑이사 공사 감독 및 시공사에도 통보)

Ⅱ		3차 회의

회의개요

○ 일  시 : 2013. 4. 9(화) 15:00~17:00

○ 장  소 : 소동물관 현장 및 호랑이사 회의실

○ 참석자

- 실무위원(7인) : 이옥하, 한미진, 한상길, 박수현, 김태극, 마동훈, 한효동

- 시 공 사(2인) : 전도종합건설, 인영건설 현장대리인

○ 회의안건

- 공사 추진사항 및 공종계획 보고

- 현안사항 검토

회의내용 및 결과

○ 건축사항

- 그릴 위치, 규격 변경(400×300mm sts철망)

- 옥상 빗물 처리를 위해 배수홈통 설치(2개)

- 철거 폐기물 증가에 따른 인건비와 상차비 증가 반영

- 내실 바닥난방 비용 검토 후 반영여부 판단

○ 설비사항

- 기존 공동구 오수배관은 존치하고, 신설 오수배관은 건물외부로 빼내 오수맨홀로 연결

- 덕트배관 시공시 동물문 와이어 설치부분(천정) 주의하여 설치(공간 확보)

- 그릴 삭제(건축에 반영)

○ 토목사항

- 우․오수관망 새로 짜기(맨홀, 집수정, 관로매설 위치 및 연장 등)

※ 내실 및 방사장에서 배출되는 오수에 대하여 (당초설계미반영) 기존 오수관로에 연결함에 있어 기존 오수관로 사용 가능여부 조사 결과에 따라 오수관로(맨홀) 신설 또는 방사장 계획고 변경이 될 수 있음.

○ 기타사항

- 설계변경은 계약된 총공사비 범위내에서 시행(관급자재 포함)

- 증가된 폐기물은 소동물관 2단계공사(담비 스라소니 공사) 폐기물 철거시 처리

- 전기공사와 일정 협의, 관급자재 요청

Ⅲ		향후계획

시공사 실정보고 후 설계변경하여 시행, 단, 철거 등 일부공정은 선시공 후 정산조치

매주 화요일 10시에 실무회의 개최

Ⅳ		행정사항

3.15일자 인사이동에 따른 실무위원(공사감독) 변경

소 속	담당분야	당 초		변 경
		직 급	성 명	직 급	성 명
조 경 과	총괄(정)	계약나급	이옥하	계약나급	이옥하
	총괄(부)	녹지8급	한미진	녹지8급	한미진
시 설 과	토 목	시설7	서동민	시설7	한상길
	건 축	시설8	박수현	시설7	박수현
	설 비	공업7	김태극	공업7	김태극
	전 기	공업7	마동훈	공업7	마동훈
동물기획과	전 시	계약다급	김효준	계약다급	김효준

끝.