문서번호	생태공원과-2724
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
김일문		최병언	12/02 차광재
협조

『한강도심 생태공원확충 조성사업』

실정보고사항 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

공원부 생태공원과

『한강도심 생태공원확충 조성사업』

실정보고사항 검토 보고

『한강도심 생태공원확충 조성사업』시행중 공사감독부서인 시설관리공단의 실정검토 사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

⇒ 공사감독3처-11797(2014.11.27)

공사개요

공 사 명 : 한강도심 생태공원확충 조성사업(2차)

공사기간 : 2014.03.21~2015.02.28(총차 2015.07.31까지)

도 급 비 : 667,900천원

도 급 자 : (주)거성토건 대표 강재봉, 남광토건(주) 대표 최장식

실정보고사항 검토결과

분야별	실정보고사항(발주청요청)	공단검토 내용	검토결과
포장공	► 반포안내센타 요청사항 반영 - 서래섬 나들목입구 우기시 배수불량등으로 배수시설 설치요청 - 서래섬나들목앞 교차로 주변 안전시설 설치(길말뚝 및 차선규제봉설치)	► 우기시 노면수의 원할한 배수를 위하여 시설물 설치 - 집수정 2개소추가 - 빗물받이 3개소 - 배수로 설치 8m ► 자전거 및 보행자 안전성 확보를 위하여 안전시설물 추가설치 - 길말뚝 추가 설치 14개소 - 차선규제봉 추가설치 46개소	안전성확보를 위하여 설치필요 개략공사비 (증 6,343천원)
	► 설계된 사고석 한강공원의 침수 특성상 유지관리에 불리하므로 과속방지턱등으로 변경시공.	► 사고석포장포장을 과속방지턱(이미지)으로 변경시공 - 사고석포장 : 120㎡ ⇨ 0㎡ - 과속방지턱(이미지) 114㎡ - 아스콘포장 절삭 1.63a	실정보고 반영 개략공사비 (감 11,007천원)

분야별	현황 및 문제점	공단검토	검토결과
포장공	► 신설되는 보행로와 동작대교 하부 기존 보행로와의 연결동선이 월활치 않고 신설되는 화장실전면부 화단설치되어 화장실 이용시 불편예상	► 화단의 일부를 소형 고압블럭포장으로 변경하여 보행로 동선 및 화장실 이용객의 접근성 확보 - 소형고압블럭 507㎡증 - 경계석설치 13m설치 《사급자재》 - 소형고압블럭(t=60mm) 128㎡ - 경계석(150*150*1000)=13m	한강공원 이용객의 불편사항 해소를 위하여 설치필요 (증 3,560천원)
	► 호안C 식생매트 설치작업을 위한 교통 유도 및 안전시설미반영되어 자전거 및 보행자의 안전성 확보곤란	► 현장여건에 맞게 교통유도원 및 안전시설물을 추가 설치하여 한강공원 이용객의 안전성 확보 시행 - 라바콘 및걸이대 : 400m 추가 - 안내간판 : 4개소추가 - 교통신호수 :5일추가	실정보고 반영 개략공사비 (감 2,273천원)

공사비 증감(개략공사비) : 증1,169천원

보고자 의견

실정보고사항 검토결과 그 내용이 타당하므로 공사감독부서로 실정검토내용과 같이 승인 통보하고 추후 설계변경시 물량 증·감 사항에 대해 정산처리 하고자 함.

붙임 : 시설관리공단 실정보고 관련문서 1부.  끝.