투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(장충체육관 연결통로 건축공정 조속완료 촉구)

1.업무지시현장 :  장충체육관 리모델링 기계설비공사 주식회사 아이티엠코퍼레이션건축사사무소, 장충체육관 리모델링 기계설비공사 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2014-12-02 00:12:00

3.지 시 내 용:              1. 설비부-13380(2014.11.27.)호의 장충체육관 연결통로 에스컬레이터 설치를 위한 가설비계 철거요청과 관련입니다.

2. 지하철 연결통로(장축체육관~3호선동대입구 5번출구)의 건축 잔여공정(석공사, 캐노피 설치 등) 지연으로 후속공정인 에스컬레이터 설치가 장기간 중단상태에 있습니다.

3. 이에 따라 에스컬에이터 설치를 우선 시행할 수 있도록 연결 통로상에 있는 가설비계 철거를 요청한 바 있으나 아직까지 이행되지 않아 연말준공 및 내년 행사계획에 큰 차질이 우려되어 재 촉구하니 책임감리원은 후속 에스컬레이터 설치에 소요 되는 절대작업기간을 감안, 2014.12.10.까지 건축 잔여공정 완료 및 비계가 철거될 수 있도록 특단의 대책을 강구 조치하시기 바랍니다.

가. 에스컬레이터 잔여공사 : 에스컬레이터 트러스 조정, 조정장치  설치, 배관배선작업, 가이드 레일 설치, 스테인레스 마감작업, 승강기안전관리원 검사, 시운전 등

나. 작업 소요기간 : 약 20일 소요

첨부 : 업무지시전(설비부-13380호, 2014.11.27.)

끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는

문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송

처리 됩니다.

- 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송

후 One-PMIS에서 재작성을 해주시기 바랍니다.

주무관							이종근			열빛총괄과장					12/02 代김은덕
협조자
시행			설비부-13582									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길15, 2동 2층(서소문동)															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8603						/전송			02-3708-8659					/	keun@seoul.go.kr												/	대시민공개