함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	실시협약 이행 촉구(4차)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시철도설계부-5565(2012.7.16), 도시철도설계부-7255(2012.9.14), 도시철도설계부-9747(2012.12.12), 도시철도설계부-1204(2013.2.18), 도시철도설계부-2220(2013.3.27),도시철도설계부-2426(2013.4.2), 도시철도설계부-2754(2013.4.11)호와 관련입니다.

3. 본 사업의 원활한 추진을 위하여는 실시협약 제14조에 의거 사업시행자의 책임하에 재원의 조달을 하도록 되어 있음에도 현재까지 타인자본이 투입되지 않고 있어 우리시에서는 그간 수차례 실시협약 이행을 촉구한 바도 있습니다만, 최초인출 기한(2013.5.24)이 도래하고 있어 재촉구하오니 조속 투입될 수 있도록 하여 주시기를 당부드리며,

4. 또한, 사업시행자의 건의에 따라 우리시에서는 당초 총사업비 조달계획상 타인자본 투입시기를 실공정율을 감안하여 2010년 3/4분기(공정률 25.35%)에서 '12년 1/4분기(공정률 33.84%)로 변경해 준 바 있음에도 사업시행자는 공정률이 달성된 '13년 1/4분기에도 타인자본을 투입하지 않고 있는 것은 실시협약 상의 의무를 다하지 않는 행위에 해당한다 할 것입니다.

5. 따라서 우리시에서는 타인자본 조달과 관련하여 사업시행자가 대주단과의 금융약정에 따라 필요한 제반서류 등이 '13.4.24.까지 사업시행자의 사유로 충족되지 못하여 타인자본이 조달되지 않으면 실시협약 위반에 해당하는 것으로 판단하고 부득이 사업시행자의 귀책사유로 인한 협약해지 절차를 이행할 수밖에 없음을 알려드리오니 사업시행자 및 출자자들은 대책을 강구하여 주시기 바랍니다.   끝.

								서울특별시도시기반시설본부장
수신자					(주)우이트랜스,(주)포스코건설,(주)대우건설,고려개발(주),두산건설(주),(주)한진중공업,원하종합건설(주),현대로템(주),(주)포스코아이씨티,홍용종합건설(주),(주)삼안
주무관							장운선				경전철계획과장					김성기					경전철추진반장					노우성					도시철도국장						신한철
도시기반시설본부장							04/18 조성일
협조자				법무담당관							정석윤
시행			도시철도설계부-2964										(						)		접수												(						)
우	100-130					서울시 중구 서소문로 89(순화빌딩) 11층 도시철도설계부																/			http://subway.seoul.go.kr
전화									/전송			02)772-7304					/														/	대시민공개