문서번호	총무과-14667
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
윤수희		김영선	12/02 이인숙
협조
	주무관		윤석존

몽촌역사관 관람 및 교육환경 제고를 위한

몽촌역사관 상설전시실 패널 보수계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

(몽 촌 역 사 관)

몽촌역사관 관람 및 교육환경 제고를 위한

몽촌역사관 상설전시실 패널 보수계획(안)

｢시민재산 이용 활성화｣ 및 ｢꿈마을에코뮤제｣와 관련, 몽촌역사관의 전시환경을 개선하기 위해 패널을 보수하여, 몽촌역사관의 시민이용 공간활용도를 높이고 몽촌역사관을 찾는 어린이 관람객들의 학습효과 증진 및 관람ㆍ교육환경을 개선하여 ‘체험형 박물관’으로 특성화 하고자 함.

1	사업 개요

□ 사업제목：○ 몽촌역사관 상설전시실 패널 보수

□ 추진근거：○ 시유재산 이용 활성화로 시민행복 증진 프로젝트(자산관리과-12944, 2014.10.22)

- 검토결과 : 몽촌역사관은 어린이를 타겟으로 하는 ‘체험형 박물관’으로 특성화

※ 관련 : 시 소유 건물 공간에 대한 활용율 제고(시장지시사항824-17)

○ 몽촌역사관 중장기 발전계획(총무과-15257호, 2013.12.30.)

□ 사업목적： ○ 상설전시실의 전시환경을 개선하기 위해 전시패널을 보수하고자 함

□ 소요예산：금21,200천원(예정)

2	추진 방향

○ 서울시 ｢시유재산 이용 활성화｣ 및 몽촌역사관 ｢꿈마을에코뮤제｣ 프로젝트 관련, 관람객의 대다수를 차지하는 어린이를 대상으로 하는 ‘체험형 박물관’에 맞는 패널 마련

○ 패널 보수시 어린이 눈높이에 맞도록 패널을 보수개편

○ 어린이의 이해를 돕는 영상 및 일러스트 추가하여 관람객들의 입체적 이해 도모

3	세부 추진내용

□  전시패널 보수 내역

○ 기존 전시패널 및 전시장의 노후화된 이미지 개선, 산뜻한 이미지로 재구성

- 기존 전시패널 보수 및 이미지 재편집, 교체 (12식)

- 유물 설명카드 교체 (300개)

○ 패널 보수시 어린이 눈높이에 맞도록 패널형태 보수 및 배치시 높이 조정

- 설명문을 줄이고 그림으로 이해, 패널 높이 낮게 조정 (현재보다 10-20cm 낮춤)

○ 어린이의 쉬운 이해를 돕는 이미지 추가

- 어린이들이 선사와 고대문화를 쉽게 이해할 수 있도록 장신구 착장모습 또는 고인돌 축조과정 등 이미지 추가 (일러스트 및 사진, 영상)

□  시공개요 : 전시패널 보수공사 1식

- 시공장소 : 몽촌역사관 지상1층 상설전시실 내

- 시공내역 : 패널 교체 및 보수

- 시공기간 : 착수일로부터 30일

- 시공도면 :                                              ※ 붙임문서 참조

4	소요예산 및 발주방법

○ 예산금액 : 금21,200,000원(금이천일백이십만원)

구 분	수 량	예 산 액	비 고
전시기획 및 설계도 작성	1식	1,500,000
패널 제작 및 그래픽	1식	14,700,000
전시영상 및 일러스트 제작	1식	5,000,000
총 계 (부가세 포함)		21,200,000

○ 예산과목 : 한성백제박물관 총무과, 선사·고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반 구축, 박물관 유지 운영, 일반운영비, 공공운영비(100-201-02)

○ 계약방법 : 소액수의계약

○ 근    거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호

5	향후 계획

○ 방침 수립 : 2014. 12. 2

○ 설치공사 계약 및 시공 : 2014. 12. 4 ~

붙임 : 1) 시공도면 1부

2) 패널보수 기획안 1부

※ 성과지표 : 12. 관람환경의 적정성.  끝.