투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	실정보고에 대한 회신(한강도심생태공원확충조성사업)

1. 공사감독3처-11797(2014.11.27)호의 실정보고에 대하여 검토하고 아래와 같이 통보하오니 세밀한 검토후 공사 설계변시 반영하시기 바라며,

2. 2차공사 준공에 차질이 없도록 설계변경등 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 실정보고 검토회신

실 정 보 고	회 신 사 항	공 사 비	비고
- 서래섬 나들목입구 배수시설 추가 설치 - 서래섬 나들목 입구 교차로주변 안전시설 설치	공단보고대로 승인	증액(6,343천원)
서래섬 나들목 교차로주변 사고석 포장 제외	공단보고대로 승인	감액(11,007천원)
보행자 및 화장실 이용객 불편 사항 해소를 위한 보행로 확보	공단보고대로 승인	증액(3,560천원)
호안C 식생매트 설치작업시 보행자 및 자전거 이용자의 안전확보를 위한 신호수 및 안전시설 추가	공단보고대로 승인	증액(2,273천원)

끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김일문		생태공원과장	12/02 최병언
협조자
시행	생태공원과-2725	(		)	접수		(		)
우	133-820	성동구 강변북로 257 (성수동1가642-25)	/
전화	02-3780-0632	/전송	02-3780-0745	/	kim751515@seoul.go.kr	/	대시민공개