문서번호	시설관리과-25434
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
곽진선	최양주	이자원	12/02 이상래
협 조
	급수설비팀장		유인행
	주무관		이상무
	주무관		손종백

화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소 세척갱생관정비공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2014. 12. 2(화)

강서수도사업소

(시설관리과)

화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소 세척갱생관정비공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소 세척갱생관 정비공사에 대한 설계변경 심의위원회(타당성 검토)를 개최하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련공문 : 시설관리과-(2014.12.1.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소 세척갱생관 정비공사

○ 위    치 : 강서구 화곡본동 24-268 ~ 971-1번지외 2개소

○ 규   모 : 관로(D=15~200㎜, L=1,264m ), 변실(D=80~300mm,32개소)

○ 기    간 : 2014. 4. 4.~ 2014.12.9.

○ 총공사비 : 732,626,620원

총공사비	도 급 비	관 급 비	복구 및 기타	비 고
732,626,620	361,928,620	130,698,000	240,000,000	낙찰률 86.768%

○ 시 공 사 : 용은씨엔씨(주) – 현장대리인 김용만

○ 공사감독 : 서울시시설관리공단(공사감독2처) 서홍석

○ 공 정 률 : 100%(D15~200㎜, L=1,331m)

□ 예산과목

○ 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비(세척갱생관)

□ 설계변경 심의위원회 개최

○ 일   시 : 2014.12.2.(화) 10:00

○ 장   소 : 사업소 4층 회의실

○ 내   용 : 설계변경 타당성 등 검토

- 설계변경 도면 및 내역서 등 사전 심의자료 이메일 발송

○ 심의위원

- 심의위원장 : 시설관리과장

- 심의위원 : 급수운영과 시설6급 유인행, 시설6급 이상무

시설관리과 시설6급 최양주, 시설6급 손종백

- 간   사 : 시설8급 곽진선

○ 심의결과 : ‘적  정’

□ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	732,626,620원	658,476,640원	감) 74,149,980원
도급비	361,928,620원	284,658,000원	감) 77,270,620원
관급비	130,698,000원	133,037,000원	증) 2,339,000원
이전비(복구비 및 기타)	240,000,000원	240,781,640원	증) 781,640 원

(단위, 원)

□ 행정사항

○ 심의결과에 따라 최종 설계변경 시행 및 계약의뢰 – 본청(재무과)

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경도면 1부.

3. 설계변경심의결과서 1부.  끝.

작 성 자	시설관리과장 : 이자원☎3146-3990 시설관리팀장 : 최양주☎4012 담당 : 곽진선☎4009