투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	도시계획시설(도로, 광장)사업 실시계획(변경) 인가 요청(남부순환로~봉오대로간)

1. 부천시고시 제2013-160호(2013. 7.29.)로 부천시 도시계획시설(도로, 광장)사업 실시계획 인가 고시된 “남부순환로~봉오대로 삼거리간 도로개설공사“에 대하여,

2.「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제91조 및 동법 시행령 제100조에 의거 도시계획시설(도로, 광장) 실시계획 변경 고시를 요청합니다.

가. 사 업 명 : 남부순환로~봉오대로 삼거리간 도로개설공사

나. 위    치 : 부천시 오정구 고강동 11-23번지 일원

~ 부천시 오정구 고강동 12번지 일원(17호 교통광장 포함)

다. 사업규모

- 사업연장 : L=1.23km(부천시구간 L=270m), B=40m(양방향 8차로)

- 부천시구간 사업면적 : 30,433㎡(도로 : 7,544㎡, 광장 : 22,889㎡)

라. 변경사유 : 부천시구간 보상지연에 따른 사업의 준공예정일 변경

마. 주요변경 내용

1) 사업의 착수 및 준공예정일 변경

- 당초 : 실시계획고시일로부터 ~ 2014년12월31일

- 변경 : 실시계획고시일로부터 ~ 2015년12월31일

붙  임 : 부천시 도시계획시설(도로, 광장)사업 실시계획 인가 고시문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		광역도로과장	최광무		토목부장	전결 12/02 노우성
협조자
시행	토목부-23756	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 2동3층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개