문서번호	도시철도공무부-3025
결재일자	2013.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	7호선1과장	도시철도공무부장		도시철도국장
김경욱	김두주	이은상		04/24 신한철
협 조
	기획예산과장		이종만
	경리과장		유윤호
	주무관		김운수

(도시철도공사장)

품질관리실태 점검 결과 보고(1/4분기)

2013.4.23(화)

도시기반시설본부

(도시철도공무부)

작성자	부장:이은상 ☎772-7030 7호선1과장:김두주 ☎772-7032 담당:김경욱 ☎772-77173

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

(도시철도공사장)

품질관리실태 점검 결과보고(1/4분기)

내구년수 100년 목표의 튼튼한 도시철도구조물 구축을 위하여 2013년

1/4분기 도시철도공사장 품질관리실태 점검을 실시하고 그 결과 보고 임

□ 추진경위

○ 2013. 04. 08 : 1/4분기 도시철도 공사장 품질점검 실시 방침 결정(도시철도공무부-2542)

□ 품질관리실태 점검대상 : 총 13개 공구

구분	계	공구명	공정율 (계획/실적)	주요 추진내용	주관부서
9호선2단계	3	915 ~ 917	71.5/70.3	구조물공사중	도시철도토목부
9호선3단계	4	918 ~ 921	22.8/22.7	토공, 가시설 쉴드터널 굴진중
	2	922 ~ 923	16.6/16.4	토공,가시설	도시철도공무부
우이신설선	4	1 ~ 4	68.8/35.1	토공,가시설

□ 점검기간 : ‘13. 4. 12(금) ~ 4. 19(금)(기간중 4일)

□ 중점점검내용

○ 품질관리계획 일반사항

○ 구조물 시공관리(균열, 누수, 양생, 되메우기 등)실태

○ 터널 라이닝(세그먼트 포함) 품질관리실태

○ 기타 구조물 품질관리에 필요한 사항

□ 점검반 : 이 송 교수 외 8명

○ 구조 : 하상우, 정희영, 박흥기

○ 토질및기초 : 이송, 이규웅, 황제돈, 강병윤

○ 철도/시공 : 김양중, 이섬범

□ 점검결과 : 13개 공구  총59건 적출

○ 공구별 지적사항(총괄) 및 사진 : 붙임

□ 행정사항

○ 점검결과 해당부서 및 공구별 조치 지시

○ 외부전문가 점검수당 지급(계좌입금)

- 예산액 :   2,400,000원(200,000원 × 12인)

․ 9호선2단계 :   600,000 원(3개 공구)

․ 9호선3단계 : 1,000,000 원(6개 공구)

․ 우이~신설  :   800,000 원(4개 공구)

따로붙임 : 1. 공구별 지적사항(총괄) 1부.

2. 지적사항 사진 1부.

3. 품질점검표(26장) : 별첨.   끝.