문서번호	교통운영과-22692
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통운영팀장	교통운영과장
문기영		심혁보	12/02 강진동
협조
	실무사무관		이문주

준공기한 연기보고

2014. 12

도시교통본부

(교통운영과)

「교통안전수칙 플래시 몹 영상제작 용역」

준공기한 연기보고

교통안전에 대한 시민의식 개선과 교통사고사상자를 줄이기 위해 시민과 서울시가 함께 참여할 수 있는 「교통안전수칙 플래시 몹 영상제작」용역과 관련하여 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 용역 현황

가. 용 역 명 : 교통안전수칙 플래시 몹 영상제작 용역

나. 사업개요 : 5가지 교통안전수칙 플래시 몹 영상제작

다. 계 약 일 : 2014. 11. 07.

라. 착 공 일 : 2014. 11. 08.

마. 준공기한 : 2014. 11. 30.

바. 계 약 자 : ㈜어썸크루미디어 (대표 나성환, ☎ *************)

사. 계약금액(도급액) : 금21,200,000원

아. 공정율 : 80%

□ 보고 내용

가. 사업진행 현황

ｏ 2014.11.16. : 전좌석 안전벨트 매기 등 교통안전수칙 영상촬영 완료

ｏ 2014.11.24. : 교통안전수칙 1차 영상물 제작 완료

ｏ 2014.11.26. : 교통안전수칙 1차 영상물 검토회의(수정 ‧ 편집 요청)

나. 연기 사유

ｏ 교통안전수칙 플래시 몹 5가지 주제의 영상물이 제작 완료(1차)되었으나, 교통운영과의 완성된 영상물에 대한 수정 ‧ 편집 요청에 따라 준공기한 내 완료가 어려운 실정임

□ 조치 계획

가. 상기와 같이 준공기한 내 용역이 불가함에 따라 준공기한을 연기하여 용역 시행에 만전을 기하고자 합니다.

나. 준공기한 변경

구 분	준 공 기 간	계 약 금 액	비 고
당 초	2014.11.8 ∼ 2014.11.30.(23일)	21,200,000원
변 경	2014.11.8 ∼ 2014.12.30.(53일)	21,200,000원
증 ․ 감	증 30일	-

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

(관련근거 : 지방자치단체 공사계약일반조건 Ⅶ-1-다의 지체상금 미부과사유)

라. 준공기한 변경의뢰 (재무과)

붙임 : 1. 합의각서 1부

2. 준공기한 변경의뢰서 1부.  끝.