문서번호	정수과-5055
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김진수		정종기	12/02 代유영준
협조
	주무관		이금재

2,3계열 정수지 청소 관련 보고

2014. 12 .

뚝도아리수정수센터

정 수 과

2,3계열 정수지 청소 관련 보고

『2014년 정수시설물 청소 및 준설』 감독 업무 수행에 따른 2,3계열 정수지 청소에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

정수시설물 청소 및 준설 발주 현황

○ 업 체 명 : ㈜ 와이씨산업개발 (대표 : 박남재)

○ 계약기간 : ’14. 3. 19 ~ 12. 31

○ 계약금액 : 65,118,537천원

진행사항 보고

○ 현재 2,3계열 정수지외 기존 시설물에 대한 청소는 완료하였으며,

○ 2,3계열 정수지 청소는 1계열 정수지가 정상 생산되어야 2,3계열에 대하여 한 계열씩 비우고 청소가 가능한 실정인바,

○ 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 감리단 및 본부 고도정수반에 1계열 정수지 내부방식공사와 관련 2,3계열 정수지 청소 가능일에 대하여 통보 요청(정수과-3442 ‘14. 9.12)하였음.

○ 통보된 사항은 2계열 연속부하 시운전 일정에 맞추어 1계열 정수지 정수생산이 가능한 ‘14년 12월 중 가능함을 통보(뚝도(CM)2014-409 ’14. 11. 7)함.

2, 3계열 정수지 청소에 따른 문제점

○ 1계열 정수지 정상 생산은 대체급수가 선행이 되어야 하며 대체급수 관련 관계자회의(2014. 11. 14(금))을 개최하였으나 대체급수 방안이 결정되지 않아 12월중에는 대체급수가 어려울것으로 예상되며,

○ 현재 신설 2계열 여과지를 정상 가동하기 위한 시운전 중 발생한 사항으로

- 역세척 시 원활한 퇴수가 이루어지지 않으며, 역세척 배관에 공기 유입등이 발생되어,

- 물생산을 위한 역세척 공정 및 수질검사 등이 12월에 보완 완료되기 어려움.

조치자 의견

○ 1계열 정수지가 정산 생산되기 위해서는 대체급수와 2계열 여과지 시운전중 발생한 사항에 대하여 보완되어야 2,3계열 정수지 청소가 가능한바,

○ 2,3정수지 청소는 2계열 여과지 정상가동 및 대체급수가 완료된 시기에 맞추어 청소코자 하오며,

○ 발주되여 시행중인 『정수시설물 청소 및 준설용역』에 대하여 설계변경 시 2,3정수지청소 물량감소 등에 따른 사항을 반영 정산처리코자 합니다. 끝