문서번호	토목부-23749
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널건설과장	토목부장
조현형	권혁대	12/02 노우성

공사비 집행계획 검토보고

(신림~봉천터널 도로건설공사(2공구,4차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.12.

도시기반시설본부

(토목부)

공사비 집행계획 검토보고

(신림-봉천터널 도로건설공사(2공구,4차)

신림-봉천터널(2공구) 4차공사의 대인갱 라이닝공사 시공시기 조정으로 감액되는 공사비의 집행계획에 대한 검토보고임.

Ⅰ				관련근거

□ 신봉감 14-329호(2014.11.19.) : 4차공사 시공구간 변경 실정보고

Ⅱ				사업개요

□ 위    치 : 관악구 신림동 393-1 ~ 봉천동 낙성대JC

□ 규    모 : 왕복 4차로,  연장 2.48Km(터널 2.29km)

□ 사업기간 : 2010. 10. 8 ~ 2017. 12. 31

□ 사 업 비 : 234,273백만원(보상 45,099, 공사 189,174)

□ 시공/감리 : 지에스건설(주)/(주)신성엔지니어링

Ⅲ				현황 및 문제점

□ 강남순환 도시고속도로와 접속되는 대인갱 라이닝공사가 금년(4차)에 계상되어 있으나, 강남순환(6-1공구)의 라이닝 시공이 지연됨에 따라 대인갱 라이닝공사 시공이 불가한 실정임

Ⅳ				감리 검토의견

□ 대인갱 라이닝공사를 강남순환 도시고속도로(6-1공구)의 라이닝 공정에 맞추어 2015년에 시행하고, 미반영된 부대시설 및 실적정산 항목으로 반영하고자 함.

- 미반영 부대시설 : 교통처리원, 살수차, 시공 측량비, 차량, 시험비

- 실적 정산 : 퇴직 공제부금비, 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료

□ 시공 변경내용

1) 당  초

2) 변  경

3) 설계변경 세부내역

구분	공종명	단위	당 초		변 경		증 감		비고
			수 량	금 액(천원)	수 량	금 액(천원)	수 량	금액(천원)
구조 물공	BOX	M	89	2,482,057	89	2,482,057		-
	소계			2,482,057		2,482,057		-
터널공	차량갱라이닝	M	156	213,502	156	213,502		-
	대인갱라이닝	M	59	90,510	-	-	감) 59	감)90,510
	터널 갱문	M	2	42,000	2	42,000		-
	소계			346,012		255,502		감)90,510
부대공	교통처리원	식	0.031	9,500	0.185	56,695	증)0.154	증)47,195
	살수차,품질관리차량	식	0.031	1,709	0.426	23,485	증)0.395	증)21,776
	시공측량비	Km			0.865	4,234	증)0.865	증) 4,234
	가설건물	식	0.031	17,298	0.031	17,298		-
	감독차량	식	0.031	1,807	0.138	8,043	증)0.107	증) 6,236
	중기운반,시험비	식			0.174	17,718	증)0.174	증)17,718
	소계			30,314		127,473		증)97,159
제경비	제경비			1,484,490		1,493,736		증) 9,246
	실적 정산 항목 (퇴직공제,하도급대금지급보증)			22,697		6,802		감)15,895
	소계			1,507,187		1,500,538		감) 6,649
총 공 사 비				4,365,570		4,365,570

4) 4차공사비 변경현황

(단위 : 원)

구 분		당초금액	변경금액	증감금액	비고
총공사비		4,364,570,000	4,364,570,000	0
도급금액	순공사비	2,858,382,745	2,865,032,573	증)6,649,828
	제 경 비	1,109,408,165	1,102,758,337	감)6,649,828
	부가가치세	396,779,090	396,779,090	0
	계	4,364,570,000	4,364,570,000	0

Ⅳ				조치의견

□ 감리 검토의견과 같이 대인갱 라이닝공사 시공시기를 조정(2015년) 하여 감액되는 공사비를, 미반영된 부대시설 및 실적정산 항목으로  추후 설계변경시 반영하고자 함.  끝.