문서번호	급수운영과-26005
결재일자	2014.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
최선보		代정헌석	전결 12/02 장시명
협조

설계변경보고

(가산초등학교외 12개소 아리수 직결음수대 설치 및 교체공사)

2014. 12.

남부수도사업소

급수운영과

설계변경 보고

(가산초등학교외 12개소 아리수 직결음수대 설치 및 교체공사)

가산초등학교외 12개소 아리수 직결음수대 설치공사를 완료하고

신규공종 및 물량 증ㆍ감이 발생되어 조치계획을 검토 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 가산초등학교외 12개소 아리수 직결음수대 설치 및 교체공사

계약상대자 : (주)주흥건영 대표 김주문

공사개요 : D=13~25㎜ L=162m

계약금액 : 18,360,300원

공사기간 : 2014. 10. 06 ~ 2014. 12. 04

Ⅱ		설계변경 사유

지방자치단체를 당사자로 하는 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액 조정)

학교 아리수 직결음수대 설치공사에 따른 신규공종 및 물량 증ㆍ감 발생

Ⅲ		설계변경 세부내역

금액변경

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감액	비 고
도 급 액	18,360,300	20,080,000	증 1,719,700

물량 증감 내역

음수대 배관 부설 : 문일중ㆍ고등학교외 6개소 아리수 음수대 위치 변경

및 식당용 아리수 음수대 추가설치(4대)에 따른 변경

구 분	계	13㎜	20㎜	25㎜
당 초	162	22	90	50
변 경	295	234	-	61
증ㆍ감	증133	증 212	감 90	증 11

신규공종 및 신규자재 : 낙찰율 적용

신규공종 : 가교발포 폴리에틸렌 보온공(D15×25T)외 1종

신규자재 : 스텐인리스 볼밸브(13A)외 4종

Ⅳ		조치의견

상기와 같이 신규공종 및 물량 증ㆍ감이 발생하여 설계변경 공사추진에 만전을

기하고자합니다.

첨부 : 설계변경내역서 1부.  끝.