과 장		12/02 국중진		팀 장	홍수종		심사자	하승환		설계자	최영서	설 계		심 사		결 재
												2014년 11월		2014년 11월
설 계 서(2차 변경)
	용역명 : 2014년 폐아스콘 운반 및 처리용역(연간단가)-1구역
	구 분					금 액									비 고
						당 초			변 경				증 ․ 감
	총 공 사 비					218,878,000			327,393,000				증 108,515,000
	도급비		공 급 가 액			198,980,000			297,630,000				증 98,650,000
			부 가 가 치 세			19,898,000			29,763,000				증 9,865,000
			계			218,878,000			327,393,000				증 108,515,000
□ 용역개요 ○ 폐아스콘 운반 및 처리 당초 21,055톤 -----> 변경 28,650톤 ○ 폐콘크리트 운반 및 처리 당초 500톤 -----> 변경 900톤