문서번호	도로보수과-7117
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
김종범		손수희	12/03 송상영
협조
	주무관		박일연

설계변경(5회) 검토보고

(관내포장도로 불량맨홀정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

동부도로사업소

(도로보수과)

설계변경(5회) 검토

관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

우리 사업소에서 시행중인 『관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』에 대하여 서울시시설관리공단으로부터 설계변경(5회) 보고가 있어 이에 대한 검토 보고임

관련근거 : 시설관리공단 공사감독1처-12849호(‘14. 12. 01.)

1		공사 개요

공 사 명 : 관내포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

공사기간 : 2014.3.21 ~ 2015.2.28

공사개요 : 불량맨홀 정비 843개소(주간 423개소, 야간 420개소)

도 급 비 : 741백만원

도 급 자 : 태평림건설㈜ 대표 이동균

2		보고 내용

설계변경 사유

o 포장분야 집행잔액 활용에 따른 공사비 증액

- 2014년 하반기 포장분야 집행잔액 추진계획

(도로보수과-6844호, 2014.11.24.)

주요 변경내용

o 불량맨홀 정비(주간) : 당초 423개소, 변경 418개소

o 불량맨홀 정비(야간) : 당초 420개소, 변경 454개소

공사비 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	비 고(증·감)
총 공사비		750,000,000	800,000,000	증) 50,000,000
도급비	공 급 가 액	674,223,637	719,208,182	증) 44,984,545
	부가가치세	67,422,363	71,920,818	증) 4,498,455
	계	741,646,000	791,129,000	증) 49,483,000
폐기물 처리비		8,354,000	8,871,000	증) 517,000

3		검토 및 조치의견

상기 설계변경 내용이 적정하므로 설계변경 시행후 변경계약 시행 코자 합니다.

따로붙임 : 1. 서울시시설관리공단 공문(보고서) 1부

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.