투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)	SH공사 토목1팀장
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 통보(내곡보금자리주택지구 조성공사)

1. 도로보수과-5582(2014.9.29.)호 및 토목1팀-5497(2014.12.2.)호와 관련입니다.

2. SH공사에서 시행하고 있는 『내곡보금자리주택지구 조성공사 교통안전시설물(노면표시) 설치공사』 원인자부담 공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니,

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

공사명	구분	설계사	감리사	시공사	공사기간 변경
					당초	변경
내곡보금자리주택지구 조성공사 교통안전시설물(노면표시) 설치공사	노면표시	도로교통공단	도로교통공단	㈜창희이엔에스	‘14.5.28 ~ '14.11.30	‘14.5.28 ~ '15.5.31

나. 변경사유 : 토목공사 지연에 따른 공기연장.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	SH공사사장,서울서초경찰서장(교통과장),서초구청장(교통운수과장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
주무관	김종섭		주무관	박일연		도로보수과장	12/03 손수희
협조자
시행	도로보수과-7084	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0352	/전송	02-2040-0307	/	resta2002@seoul.go.kr	/	대시민공개