투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	한강교량 일상유지보수공사(연간단가) 설계변경(3회) 계약의뢰

1. 교량보수과-4596(2014.12.03)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 한강교량 일상유지보수공사에 대하여 아래와

같이 설계변경(3회) 계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-동부

나. 공사기간 : 2014.04.07 ~ 2015. 02. 28

다. 도 급 자 : 동우공영(주)  대표 이 광 수

라. 예산과목

- 도시안전실 도로시설과, 교량관리, 한강교량관리, 한강교량일상

유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

마. 변경내역

구 분	금 액		증감
	당 초	변 경
총공사비	1,403,997,150	1,409,000,000	증)5,002,850
도 급 비	1,390,732,000	1,408,200,000	증)17,468,000
이 전 비 (페기물처리비)	13,265,150	800,000	감)12,465,150

바. 변경사유 : 집행잔액 활용계획에 따른 계약물량 증∙감으로 인한

설계변경

따로붙임 : 1.설계변경 검토 보고서 1부.

2.책임감리단 검토보고서 1부.

3.설계서 갑지 1부.

4.합의각서 1부.

5.변경내역서 1부.끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	조장호		교량보수과장	12/03 김환겸
협조자
시행	교량보수과-4599	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동2번지)	/
전화	02-2040-0383	/전송	02-2040-0308	/		/	대시민공개