투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(2차1회) 계약의뢰(옥수나들목)

1. 우리 본부에서 추진중인 『한강공원 나들목 증설공사(옥수)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차1회)계약을 의뢰하오니 처리하여 주기기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(옥수2차)

나. 계약기간 : 2014. 2. 21 ∼ 2015. 2. 20

다. 계약금액 : ￦1,127,000,000원

라. 시 공 사 : 신성월드건업(주), 대보실업(주)

마. 감 리 사 : ㈜케이알티씨, ㈜서영엔지니어링

바. 설계변경(2차1회)

구 분	2차1회			비고 (사유)
	당 초	변 경	증·감
도 급 비	1,127,000,000	1,127,000,000	-
계약기간	2014.02.21. ~ 2015.02.20.	2014.02.21. ~ 2014.12.20.		공사완료

- 수량조정에 따른 공사비 조정 및 계약기간 변경

사. 예산과목 : 한강공원이용 및 생태환경 개선, 한강의 자연성 회복 및 시민편의 개선,               한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비(100-401-01)

첨부 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 사유서(요약서) 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 합의각서(공사기간변경) 1부. 끝.

	치수과장
주무관	방호익		치수과장	12/03 김용제
협조자	주무관	박정태
시행	치수과-4265	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	3780-0744	/		/	대시민공개