문서번호	총무과-8763
결재일자	2013.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	총무과장	총무부장	한강사업본부장
주병준	김영기	정진일	06/07 한국영

‘한강 행복몽땅 프로젝트’ 추진상황 보고

2013.6.5(수)

한강사업본부

(총무과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	시민참여행사 개최	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	전문가 자문 시행	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 ■	(	민간단체 행사참여	)	무 □
	●	기업	:	유 ■	(	민간업체 참여	)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	주요 시설물 설치 협의	)	무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(	민간단체 참여 협의	)	무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	문화재단 협의	)	무 □

｢한강 행복몽땅 프로젝트｣ 추진상황 보고

□ 사업현황 : 총 3개 분야, 30개 사업

○ 휴식공간 조성 등(10) : 캠핑장, 낚시테크 조성, 꽃길조성, 씨름장 등

○ 문화・체험(10) : 명화상영, 수상음악회, 거리공연, 별보기체험 등

○ 수상・레져(10) : 배다리, 윈드서핑, 레포츠 체험, 수생태 체험 등

	<추진상황>
① 정상추진 : 27개 ② 관리대상 : 3개 ○ 협의중(1) : 배다리(5.28 협의, 국방부 6월중 현장방문 및 세부내용 논의 예정) ○ 지 연(1) : 낚시데크 조성(부유식 보완으로 설계 및 준공일정 지연) ○ 차 질(1) : 선탠장(난지선탠장 모래톱 형성 차질로 대안검토)

□ 사업별 추진내용

① 캠핑장 조성

○ 블랙야크와 공동추진 양해각서(MOU) 체결(5.29)

○ 운영준비

- 시설공사 : 상‧하수도, 초소, 인터넷, 안내표지 등(6.3~6.28)

※ 와이파이 공사연계 : 전기공사 발주(6.20)

- 홈페이지(http//hangangcamping.com) 오픈 및 참가접수(6월 중순)

※ 이용요금(5인텐트 기준 2만원선으로 책정)

○ “얼음 위에서 키스 등” 이벤트 추진 협의 중((주)캠프엔)

② 빅게임(Big Game) - 실행계획 수립 중

○ 빅게임 실행장소 점검 완료(광나루, 이촌, 양화 등)

○ 운영계획 수립 : 시민참여 방법 및 절차, 신청요령, 퀴즈출제, 진행안내 등

③ 명화상영 - 실행계획 수립 중

○ ‘강변 영화제’(물빛무대, 광진교 8번가 등) : 장소별 테마 차별화

- 여의도 물빛무대(코믹 오락), 광진교8번가(독립, 예술), 반포 달빛광장(가족영화)

○ ‘다리밑 영화제’(한남대교 등 6개소) : 상영작은 시민의견을 수렴(6.24~7.7)하여 선정

④ 교량하부 휴게공간 조성 - 비가림막, 휴게시설 설치공사 중

○ 비가림막(2개소) : 가양대교(완공), 청담대교(6.20 설치)

○ 휴게시설 설치(잠실, 한남대교 등 14개소)  : 기반조성(~6.10), 완공(6.28)

⑤ 낚시데크 설치

○ 일정변경 : 설계완료 및 공사발주(당초 6.10→6.30), 공사착공(당초 7.1→7.20)

※ 설계변경 및 국토교통부협의 결과에 따라 준공지연 예상

○ 지연사유

- 부유식의 고정용 로프가 낚시줄과 얽혀 문제가 있을 수 있다는 전문가 의견에 따라 부분고정 방식 보완 검토

⑥ 선탠장 조성(난지) - 모래톱 형성 미흡으로 대안 검토

○ 현장조사(5.21~5.31) : 모래(30톤)를 포설하여 수위 등 현장 관찰

- 만조시 모래톱 미형성(포설 모래 40% 유실)

→ 하절기 강수 횟수 및 강수량 증가로 수위 상승

※ 지난 3월말 조사시 : 길이 70m에 걸쳐 만조시 약 1~2m의 모래톱 형성

○ 대안 검토

- 난지야구장과 캠핑장 사이 잔디밭에 선탠시설(규모 200㎡) 설치

- 인근에 조성되는 휴게쉼터(3개소, 의자 등 설치, 총 118㎡)를 휴식공간으로 활용

- 별도로 6개 한강수영장에 선탠장 운영(1,900㎡, 의자 480개 규모)

□ 주요 현안사항

○ 영화 ‘괴물’을 활용한 스토리텔링 추진

- 괴물 모형 제작, 판넬 설치 등 다양한 방안을 문화관광디자인본부 주관 「2013년 한강스토리텔링사업」에 추가 반영하여 추진 중

○ ‘러버덕’ 대체 조형물 설치 검토

- “서울크리에이터즈”의 ‘카카오 아지트’에 회원 가입 완료(6.5)

- ‘러버덕’ 대체물을 안건으로 제시, 다양한 전문가 의견 수렴(6.8~6.20) 후 결정

○ 여주외 지역 4대강 모래 활용방안 검토

- 여주 모래 구입비용은 32,120원/㎥(모래가격 : 12,000/㎥, 운송비 17,200원, 부가세)

※ 서울지역 구입비용 : 24,200원/㎥(여주모래에 비해 7,920원 저렴)

- 충주시, 부여군, 공주시의 경우도 여주와 비슷한 가격(12천원/㎥)으로 매각하고 있으며, 운송비용(200원/km)을 포함할 경우 서울 시중구매 단가(24,200/㎥) 보다 높아 활용 곤란

□ 향후계획

○ 테마별 기획보도 추진

- 보도대상 : 캠핑장, 명화상영, 교량하부 휴게공간 등

- 추진방법 : 방송, 신문 등 매체 협의(대변인 협조)

※ YTN 뉴스,「한강 행복몽땅 프로젝트」보도예정(6.8~6.9) : 뚝섬 캠핑장 등 소개

○ 실행계획 수립 및 행사장 현장점검

- 캠핑장 등 시설조성, 문화․체험행사 운영계획 등 수립

- 캠핑장, 휴게공간 등 시설설치 현장 방문 및 안전 점검. 끝.