문서번호	은평병원원무과-8194
결재일자	2013.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
유영환	전재용	代전재용		06/07 남민
협 조

노후(누수)난방 배관 교체 등 정비공사

2013. 06.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

노후(누수)난방 배관 교체 등 정비공사

청사 난방배관의 노후화로 인하여 누수 등이 지속적으로 발생하고 있어, 노후화된 배관 교체 등 시설을 정비함으로써 시설유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거 : 2013년도 청사관리업무 추진계획

【원무과 - 917호(2013.01.22)】

추진경위

청사 2층 난방 공급관 및 가지관 노후화로 누수 등이 지속적으로 발생하고 있어 환자 및 내방인 등 불편 및 민원발생

공사개요

공 사 명 : 노후(누수)난방 배관 교체 등 정비공사

공사대상 : 2층 난방공급관 및 가지관(입상부분-공급관에서 방으로 들어가는 관)

공사기간 : 착공일로부터 15일

공사내용

- 난방 배관 교체 공사

세부추진계획

청사 바닥 난방 배관 교체 공사(6월 예정)

- 2층 임상심리실(3)앞 복도 난방공급관 7m(천정)

- 2층 진단검사실 및 마약분석실 난방공급관 15m(천정)

- 2층 정신과 외래대기실 가지관(입상부분) 9m 및 난방공급관

20m(천정)

- 2층 안내데스크옆 연구실통로 난방공급관 7m(천정)

- 301병동 좌측통로 난방공급관 14m(천정)

공정계획(15일)

- 1 ∼ 4일 : 난방 배관 철거 및 설치작업

- 5일 : 수압시험

- 6 ∼ 7일 : 보온작업

- 8일 : 환경정리 및 장비철수

소요예산 : 7,200천원

예산과목 : 연구활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진, 은평병원운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 공공운영비(100-201-02)

계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

행정사항

공사차량 출입협조 : 원무과.

공사에 따른 소음, 먼지 등 최소화 및 안전대책(휀스, 안전띠) 확보