투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	갈현도시농업체험원 조성 전기공사 설계변경 및 준공기한 연기 시행

1. 시설과-5988(2014.12.03.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련, 갈현도시농업체험원 조성 전기공사에 대한 설계변경 및 준공기한 연기를 다음과 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 갈현도시농업체험원 조성 전기공사

나. 위    치 : 은평구 불광동 458-1번지 일대

다. 공사개요

- 공원등주 설치 21본, 방송스피커 10개, CCTV카메라 4대, 케이블·배관 1식

- 관리동 전기, 통신 공사 1식

라. 공사기간 : 2013. 12. 09. ~ 2014. 12. 08.

마. 공사금액 : 95,241,460원

바. 도 급 자 : 주식회사 대한전력 대표 김미경

사. 변경내역

(단위:원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증 감 액	비 고
계		95,241,460	95,193,000	감48,460
도 급 액	공급가액	86,583,146	86,539,091	감44,055
	부 가 세	8,658,314	8,653,909	감4,405
공사기간		2013.12.09. ~2014.12.08.	2013.12.09. ~2014.12.19.

아. 변경사유

- 현장여건에 따른 물량 증감 및 신규공종 추가

- 선행공종(조경,건축)의 준공기한 연장에 따른 후속공종의 원활한 마감

자. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 서부공원녹지사업소

차. 지체상금 부과여부 : 미부과

카. 예산과목 : 푸른도시국 공원조성과, 생활권 주변 공원확충, 도심공원 확충,                              갈현도시농업공원 조성, 시설비

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

주무관	채민수		기전시설팀장	오재영		시설과장	한성현		서부공원녹지사업소장	12/03 안해칠
협조자
시행	시설과-5992	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60(성산동 390-1)	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5563	/전송	02-300-5569	/		/	대시민공개