투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	제13차 설계변경자문회의(소위원회) 개최 알림

1. 2014년 제13차 설계변경자문회의(소위원회) 개최와 관련입니다.

2. 설계변경자문회의를 아래와 같이 위원 선정하여 개최하오니 발주부서 담당자는 자문자료에 단가결정, 협의근거, 설계자검토의견, 실정보고서, 발주처 방침서 등 근거자료를 포함 작성(쪽번호 명시)하여 자문위원에게 사전 배포하여 주시기 바라며,

3. 자문위원께서는 협의단가 적용의 타당성, 공법 변경의 적정성, 설계변경 절차 이행의 타당성등을 면밀히(사전) 검토하여 내실있는 자문이 이루어질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 자문회의 개최 계획

제 목	제13차 설계변경자문회의(소위원회)
일 시	2014. 12. 10(수) 14:00
장 소	도시기반시설본부 토목부 회의실(서소문별관 2동 3층)
자문위원	위원장 : 토 목 부 도시고속도로과장 명 경 출 간 사 : 토 목 부 박 웅 교 위 원 : 토목부 김성권, 토목부 이상근 감리단장 한광언(신사사거리~고양시계간 도로개설공사) (*************) 감리단장 양희만(서남권 돔야구장주변 보행광장설치공사) (*************) 감리단장 장철옥(서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업) (*************)
자문안건 (12건)	1. 용허리 빗물저류조 설치공사 ---------------------- 방재시설부 ο 지정폐기물 처리비용 반영 ⇒ 증 65,000천원 ο 토출관로(서초대로 68길) 변경 시공 ⇒ 증 144,900천원 2. 남부순환로~오정대로간 도로개설공사 ---------------- 토 목 부 ο 설계도서 검토결과 반영 ⇒ 증 367,218천원 ο 경계석 및 측구 형식 변경 ⇒ 증 84,510천원 ο 기존 수로구간 퇴적지반 처리비 반영 ⇒ 증 33,690천원 3. 선사로~고덕지구간 도로확장공사 ------------------- 토 목 부 ο 사토장 추가선정 ⇒ 감 360,800천원 ο 발파암 깍기 공법 변경 ⇒ 증 550,000천원 ο 강관네일링 수량변경(축소) ⇒ 감 487,300천원 ο 산마루측구 형식변경 ⇒ 감 78,900천원 ο 고덕산구간 암매각 및 상차비 반영 ⇒ 증 55,000천원

	ο 자전거도로 휀스 규격변경 ⇒ 증 68,200천원 ο 현장사무실 기간연장 ⇒ 증 85,800천원

붙임 : 설계변경 소위원회 자문요청서(12건)  1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	방재시설부장,신사사거리~고양시계간 도로개설공사 감리단장 한광언님,서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 감리단장 장철옥님,서남권 돔야구장주변 보행광장설치공사 감리단장 양희만님
주무관	박웅교		도시고속도로과장	명경출		토목부장	12/03 노우성
협조자
시행	토목부-23875	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-8664	/전송	3708-2599	/	pkyo2425@seoul.go.kr	/	대시민공개