문서번호	도로관리과-18310
결재일자	2014.12.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장관리팀장	도로관리과장
이문석		최연우	12/03 이택근
협 조

2014년 시행 불량맨홀 정비공사 점검결과(11월) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시안전실

도로관리과

불량맨홀 정비공사 점검결과 보고

2014년 시행한 불량맨홀 정비공사 현장을 점검(11월)하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 맨홀현황

○ 맨홀 설치현황 : 총 512,445개소

- 시도 : 139,061개소(차도 81,368, 보도 57,693), 구도 : 375,966개소

- 맨홀 종류별 현황

(2014년 9월말 현재)

구분		총 계	상수도	하수도	통 신	전 기	가 스	기 타
계		515,027	165,909	190,546	78,807	18,963	24,010	36,792
시 도		139,061	40,501	41,898	29,694	13,061	7,085	6,822
	차도	81,368	23,580	20,314	20,872	8,506	4,584	3,512
	보도	57,693	16,921	21,584	8,822	4,555	2,501	3,310
구 도		375,966	125,408	148,648	49,113	5,902	16,925	29,970

○ 시도구간 차도 맨홀 정비현황

구 분	계	상수도	하수도	통 신	전 기	가 스	기 타
총 계	8,378	2,221	2,637	2,767	396	85	272
’13년 정비	4,111	928	1,352	1,436	202	49	144
’14.11월현재	4,267	1,293	1,285	1,331	194	36	128

○ 사업소별 맨홀 정비현황(’14년도 : 4,267개소)(2014.11.30.현재)

구 분	’14년 합계	상수도	하수도	통 신	전 기	가 스	기 타
총 계	4,267	1,293	1,285	1,331	194	36	128
동부도로	829	284	183	318	12	9	23
서부도로	525	102	164	196	45	5	13
남부도로	612	142	166	242	39	3	20
북부도로	754	220	222	231	48	7	26
성동도로	789	258	181	273	42	12	23
강서도로	758	287	369	71	8	0	23

□ 점검결과

(2014.11월말 현재)

구분		계	동부	서부	남부	북부	성동	강서	비고
맨홀현황		81,368	13,872	17,200	14,055	14,242	11,792	10,207
‘14년 정비 완료된 맨홀 수		4,267	829	525	612	754	789	758
점검 개소수	누계	823	128	129	135	197	90	144
	11월	168	30	22	5	70	21	20
	비율	20.4	15.4	24.6	22.1	26.1	11.4	19.0
재시공 대상	누계	19	0	5	8	1	1	4
	11월	0	0	0	0	0	0	0
	비율	2.3	0	3.8	5.9	0.5	1.1	2.7
점검자			이유국 홍현기 김종범	장준성 이문석 최정필	안동국 배정근 정철식	박성록 구준서 최 완	최 현 박완송 홍수종	이광희 이옥휘 윤옥진

※ 점검 개소수 비율(%)은 누계에 대한  ‘14년 정비 완료된 맨홀 수 대비 비율임

※ 재시공 대상 비율(%)은 누계에 대한 점검 개소 수 누계 대비 비율임

○ 점검결과 재시공 대상 : 적출사항 없음

○ 기타 지적사항 : 적출사항 없음

□ 행정사항

○ 12월중 점검지역, 점검일정을 확인하여 점검 철저

- 12월중 점검지역 및 일정을 각 도로사업소 담당과 사전에 협의하여 점검

․ 12월 점검을 마지막으로 최종 결과보고 예정

․ 점검결과 제출 : 12월 24(수)한 제출

- 점검실적 부진 : 11말까지 점검실적은 정비 맨홀 개소수 대비 20% 수준임

․ 점검계획 30% 수준이 유지되도록 점검 독려

따로붙임 : 도로사업소 맨홀 점검결과 정비 실적 각 1부(6부).  끝.