함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	정수과장
(경유)
제 목	변경계약체결 보고(통보)(자동여과기 부품교체 및 수리)

1. 정수과-9267(2014.12.1)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 변경계약 내역

계약건명	계약금액(원)	계약체결일	변경사항	사 유
자동여과기 부품교체 및 수리	11,452,910	2014.12.3	계약기간 변경 2014.11.17. ~ 12.16.(30일)→ 2014.11.17. ~ 12.29.(43일)	○ 교체대상인 스크린이 수입품으로 수입에 소요되는 기간을 반영 ※ 설계당시 수입에 소요되는 기간을 반영하지 못함

따로붙임 : 1. 변경계약서 및 합의서 각 1부

2. 계약보증금 지급각서 및 지침서 각 1부.   끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	김은경		행정관리과장	안창수		영등포아리수정수센터소장	12/03 임정규
협조자
시행	행정관리과-9145	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울특별시 영등포구 노들로 11	/
전화	02-3146-5611	/전송	02-3146-5691	/	archiyou@seoul.go.kr	/	부분공개