문서번호	주거환경과-5110
결재일자	2013.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주거환경과장	주거재생정책관		주택정책실장
고병호	최성태	진희선		06/12 이건기
협 조
	주거환경지원팀장		代박용구

주민참여형재생사업 지구단위계획 수립용역(영등포구 대림동)

준공기한 연기 검토보고

2013.6

주택정책실

(주거환경과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	대림2동 주민	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 ■	(	㈜건원 외1	)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방계약법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

주민참여형재생사업 지구단위계획 수립용역(영등포구 대림동 )

준공기한 연기 검토보고

중국동포 밀집지역인 영등포구 대림동 주민참여형 재생사업 지구단위계획 수립용역에 대한 준공기한 연기사유가 있어 검토보고 드림.

Ⅰ		구역개요

□ 위치: 영등포구 대림2동 1027-1번지 일대 □ 규모: 42,959㎡, 228동 □ 지역/지구: 2종일반,최고고도지구 □ 인구/세대수: 679세대 총 2,149명 □ 비고 : 중국동포 밀집지역

Ⅱ		용역현황

□ 용 역 명 : 주민참여형재생사업 지구단위계획 수립용역(영등포구 대림동)

□ 용역기간 : 2012. 8. 20 ~ 2013. 6. 15(10개월)

□ 사 업 비 : 금 182,000,000원(부가세 포함)

□ 추진현황

❍ ‘12.09.12 : 용역 착수보고회

❍ ‘12.11.08 : 1차 주민설명회

❍ ‘12.11~’13.4 : 주민워크샵(총 9회),MP회의(총 9회)

❍ ‘13.01.17 : 1차 중간보고회

❍ ‘13.04.19 : 2차 중간보고회

❍ ‘13.04.29 : 구청장 보고

❍ ‘13.05.09 : 마을사랑방 임대(약 43㎡, 구 자치행정과)

Ⅲ		준공기한 연기보고

□ 연기사유

❍ 주민 공동이용시설(마을회관) 설치계획 수립 필요

- 매입가능한 부지가 없어 구체적인 조성 및 운영계획 미수립

- 주민워크샵 등을 통해 공용주차장 활용 등 다양한 대안 검토

❍ 주민네트워크 구축 및 마을축제 개최

- 기 확보(′13.5.9)된 마을사랑방을 통해 주민협의체 자립기반 구축 및 마을축제 개최(9월 중) 지원

※ 주민협의체 : 중국동포 9명(총 30명) 추가 구성(′13.4.17)

※ 마을축제 : 다문화공동체활성화사업 선정(′13.6.3, 외국인다문화담당관)

❍ 주민공람 등 도시관리계획 결정절차 이행의 소요 과업기간 고려

□ 준공기한 연기

당초	변경	비고
′12. 8. 20 ~′13. 6. 15	′12. 8. 20 ~′13. 9. 30	107일 연장

□ 연기사유 귀책소재 : 우리시

□ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		향후일정

□ ‘13.7월 : 마을사랑방 개소식, 주민공람 및 유관부서 협의

□ ‘13.8월 : 도시건축공동위원회 심의

□ ‘13.9월 : 마을축제 개최, 계획결정 및 고시

붙임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.

준공기한 연기요청공문 1부.  끝.