문서번호	보행자전거과-7380
결재일자	2013.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보행자전거과장	교통운영관		도시교통본부장
정종우	이원목	박영섭		06/17 윤준병
협 조
	보행안전팀장		김준섭

'13년 아마존사업 실행 계획

2013. 6.

도시교통본부

(보행자전거과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(	주민협의체, 주민설명회 등	)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	전문가코칭시스템 운영 → 자문의견 반영	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	경찰서 : 교통규제 협의 자치구 : 사업추진 협조	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

'13년 아마존 사업실행 계획

“아마존” 시범사업으로 추진중인 성북구․구로구의 설계내용을 반영한 '13년 실행계획을 보고드림

Ⅰ				개 요

□ '13년 사업개요

❍ 사업대상 : 구로, 성북, 노원, 은평, 동대문 등 5개소

- 기본 및 실시설계 : 5개소

- 시범사업 : 구로(개봉초교), 성북(미아초교) 등 2개소 시행

❍ 사업예산 : 1,100백만원

- 시범사업 공사비 1,070백만원, 사무관리비 등 기타 30백만원

□ 그간 추진사항

❍ ‘11. 10월 : 시장 공약사업

- 아이들이 마음껏 다닐수 있는 지역(Zone) 조성

❍ ‘12.  3.  9 : 아마존 사업계획 수립(부시장방침 136호)

- 주민주도 사업, 교통안전 및 생활안전 강화, 면단위 종합계획 추진 등

❍ ‘12.  7. 11 : 아마존 사업대상지 5개소 선정(본부장 방침)

- 구로(개봉초교), 성북(미아초교), 노원(은행사거리), 은평(갈현초교), 동대문(안평초교)

❍ ‘12. 12. 21 : '13년 시범사업 시행 대상지 선정(본부장 방침)

- 5개소 기본설계(안) 평가 → '13년 사업시행지 3개소 선정

❍ ‘13. 4. 17~18 : 구로, 성북 아마존 현장점검 회의(교통운영관)

- 현장에서 지역주민, 자치구 공무원, 학교장, 경찰 등과 함께 논의 및 보완

❍ ‘13. 5. 8 : 아마존 시범사업지 최종보고(본부장)

- 구로, 성북 2개소 설계내용 확정 → 하반기 시범사업 시행

Ⅱ				사업지별 세부 추진내용

1. 구로 개봉초교 아마존

□ 추진과정

❍ 기본설계(안) 마련('12.12) : '13년 시범사업 시행 대상지로 선정

❍ 주민참여 : 주민협의체(5회), 학부모 설문(2회), 주민설명회(1회) 등

❍ 전문가 코칭 시스템 : 사업 추진방향 및 사업내용 자문

- 코칭시스템 운영회의(5회), 용역 자문회의(4회), 현장 합동점검 등

❍ 최종보고회('13.5.8) : 주민의견, 자문내용 등을 종합하여 사업내용 확정

□ 기본 및 실시설계 주요내용

❍ 교통안전 시설 : 시케인(굴곡구간), 초오크(협착구간), 고원식 교차로 등

❍ 통행체계 개선 : 시간제 차량통행제한(12:30~15:30), 일방통행 등

❍ 어린이 놀이․문화 공간 조성 : 차량통행 제한구간 활용

- 전통 바닥놀이, 벽화 및 아이들 그림전시 등

❍ 착시노면(트릭아트), VMS, 과속경보 시스템 등

교통정온화기법 적용	전통 바닥놀이	착시노면(트릭아트)

□ 사후관리(주민참여)

❍ 아마존 안전협의회 : 학교, 경찰, 동장, 주민자치 위원회

❍ 아마존 순찰대 구성 : 개봉초교 아버지회, 안전둥지회, 생활안전협의회

❍ ‘내가만든 아마존’ 홈페이지 개설 : 아마존 운영방안 공모, 아이디어 수렴

□ 소요예산

❍ 시범사업 공사비(시설비) : 830백만원

※ 교통안전시설 감리비, 시설부대비, 사무관리비 등 :11백만원

2. 성북 미아초교 아마존

□ 추진과정

❍ 기본설계(안) 마련('12.12) : '13년 시범사업 시행 대상지로 선정

❍ 주민참여 : 주민협의체(2회), 주민참여 T/F(2회), 주민설명회(2회) 등

❍ 전문가 코칭 시스템 : 사업 추진방향 및 사업내용 자문

- 코칭시스템 운영회의(5회), 용역 자문회의(4회), 현장 합동점검 등

❍ 최종보고회('13.5.8) : 주민의견, 자문내용 등을 종합하여 사업내용 확정

□ 기본 및 실시설계 주요내용

❍ 교통안전 시설 : 시케인(굴곡구간), 편측보도 확장, 과속 단속카메라 등

❍ 통행체계 개선 : 시간제 차량통행제한(8~9시, 12:30~14시), 일방통행 등

❍ 어린이 놀이․문화 공간 조성 : 벽화그리기, 소리마을 담장녹화, 휴게공간 조성 등

❍ 착시노면(트릭아트), 어린이 안전체험관, 소리마을관리소 등

편측 보도확장	벽화그리기	소리마을관리소 설치

□ 사후관리(주민참여)

❍ 아마존(소리마을)운영위원회 : 생활안전협의회, 동별안전협의회, 아마존지킴이 등

❍ 아마존 순찰 활동 : 아마존지킴이, 청소년 지도협의회, 공원안전지킴이 등

❍ 상시 출동체계 유지 : 교통사고, 주정차, 쓰레기 투기, 범죄, 화재 등

❍ 어린이 안전지도(커뮤니티 맵핑) 시스템 : 스마트폰 현장신고 및 신속조치

□ 소요예산

❍ 시범사업 공사비(시설비) : 700백만원

※ 교통안전시설감리비, 시설부대비, 사무관리비 등(9백만원)

Ⅲ				'13년 아마존 실행계획

1. 아마존 시범사업

□ 구로, 성북 아마존 시범사업 시행

❍ 실시설계 : 5월 용역보고회 사업내용으로 시행(6월)

※ 노원구는 학원버스 통합운영 담보, 노점상 정비, 가판대 철거 등 선결 조치후 사업추진

❍ 공사시행 : 공사발주 및 시행(7월~10월, 자치구)

❍ 모니터링 : 아마존 사업효과, 보완 및 발전방향 검토(11월~12월, 자치구)

실시설계	⇒	예산지원 (공사비)	⇒	공사시행	⇒	모니터링
'13. 6월		6월		7월~10월		11~12월

□ 아마존 로고 디자인 개발

❍ 목    적 : 아마존을 상징화 하여 홍보와 지역 안내에 활용

❍ 개발내용 : 아마존 로고 3종 개발(노면표시, 벽면부착, 안내표지판)

❍ 추진방법 : 일반용역(디자인용역)

❍ 소요예산 : 20백만원

❍ 추진기간 : '13. 6월~7월(45일)

2. 기본 및 실시설계

□ 노원, 은평, 동대문 : '13. 8월까지 설계완료

❍ 사업내용 확정 및 실시설계 : 전문가 자문, 용역보고회, 공사비 조정 등(6월~ 8월)

전문가 자문, 용역 보고회	⇒	실시설계	⇒	예산편성	⇒	공사시행
'13. 6월~7월		'13. 8월		'13.8월~12월		‘14.3월~7월

❍ 사업대상지 선정취지에 적합한 대책 반영여부 중점검토

※ 노원(대규모 학원가), 은평(사고 위험지역), 동대문(유해시설 및 공원지역)

Ⅵ				예산 조치계획

1. 아마존 시범사업 소요예산 조치

□ 시범사업 공사비 추가확보 : 480백만원

❍ 설계 결과 공사비가 1,530백만원 소요되므로 아마존 예산과 어린이보호구역 잔여예산을 활용하여 조치

(단위 : 백만원)

구 분	계	아마존 예산	어린이 보호구역 예산	비 고
합 계	1,530	1,050	480	증480
구로구 공사비	830	587	243	증243
성북구 공사비	700	463	237	증237

※ 어린이보호구역 예산은 아마존 사업구간에 포함된 어린이보호구역의 개선에 필요한 예산임.

❍ 예산과목

- 아마존 사업 : 자전거이용활성화 및 교통환경개선/ 교통약자 안전관리강화 및 이동권향상/ 교통약자이동편의증진/ 아이들이안전한환경 아마존조성/ 시설비

- 어린이보호구역 : 자전거이용활성화 및 교통환경개선/ 교통약자 안전관리강화 및 이동권향상/ 교통약자이동편의증진/ 어린이보호구역정비/ 시설비

2. 아마존 로고 개발

❍  아마존 사업예산(시설비) 사용 : 20백만원

3. 아마존 사업예산 조정

(단위 : 백만원)

구 분			당 초	변 경	증․감	비 고
합 계			1,100	1,580	증480	증 480(백만원)
	시설비		1,070	1,550	증480
		공사비	1,070	1,530	증460	※ 어린이보호구역 잔여예산 활용
		아마존 로고 개발	-	20	증20	※ 아마존 로고 디자인 용역
	감리비		7	7	-
	시설부대비		3	3	-
	사무관리비		20	20	-
		사무관리비(시)	20	10	감10	※ 자문회의 등 기타 소요비용
		사무관리비 (자치구)	-	10	증10	※ 구청당 5(백만원) 지원
	모니터링		-	-	-	※ 자치구 자체시행

Ⅴ				행정사항

1. 향후 계획

□ '14년 사업계획 수립 : '13. 8월

❍ 설계 추진중인 3개소(노원, 은평, 동대문)을 포함하여 '14년 사업계획 수립

□ '13년 아마존사업 설계 및 공사 지속관리

❍ 실시설계 완료전 : 설계내역 점검 및 조정

❍ 공사 추진과정 : 현장점검 등 지속적인 사업관리 수행

2. 추진일정

❍ '13. 6월 : 아마존 시범사업지 실시설계 완료(구로, 성북)

❍ '13. 6월 ~ 7월 : 아마존 로고 디자인개발 용역(서울시)

❍ '13. 7월 ~10월: '13년 시범사업 공사시행(구로, 성북)

❍ '13. 8월 : '14년 사업계획 수립

❍ '13. 11~12월 : 시범사업 모니터링(구로, 성북)