문서번호	은평병원원무과-8660
결재일자	2013.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
유영환	전재용	오세양		06/18 남민
협 조

검사대상기기(보일러) 세관 및 부대설비 공사

2013. 06.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

검사대상기기(보일러) 세관 및 부대설비 공사

우리 병원 기계실에 설치된 검사대상기기(보일러) 세관 및 부대설비 공사를 시행, 열효율 향상과 연료절감을 도모하여 기기유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거 : 에너지이용합리화법 제39조 4항(검사대상기기의 검사) 및

열사용기자재관리규칙 제41조

보일러 시설현황

기기형식	용량(ton/hr)	최고사용압력(kg/㎠)	사용연료	수량(대)
강철노연증기	2.5	10.0	LNG	2

공사개요

공 사 명 : 검사대상기기(보일러) 세관 및 부대설비 공사

공사대상 : 보일러 2대

공사기간 : 착공일로부터 15일

공사내용

- 보일러 세관 및 부대설비 공사

세부추진계획

검사대상기기(보일러) 세관 및 부대설비 공사(6.19~7.2일 예정)

- 보일러 2대 화학세관 및 연실 청소

- 보일러 안전점검, 공연비 및 시운전

- 기계실 내부 응축수배관 누증부분 보수작업

공정계획(15일)

- 1일 : 자재반입 및 1호기 화학배관, 연관청소

- 2일 : 1호기 수실청소 및 폐인트, 2호기 화학배관

- 3일 : 1,2호기 폐수처리 및 2호기 폐인트, 연관청소

- 4일 : 배관보수 및 판넬점검

- 5일 : 개방검사, 청소, 시운전 및 안전장치 점검

- 6일 : 검사 및 준공

소요예산 : 6,200천원

예산과목 : 연구활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진, 은평병원운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 공공운영비(100-201-02)

계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

행정사항

공사차량 출입협조 : 원무과