위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사(외벽 및 옥외 철재계단) 도색작업 일정변경 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-154437(2014.11.27.)호「청사 외벽 및 옥외 철재계단 도색계획」

나. 행정안전부 예규 제437호 13장 공사계약 일반조건 제6절「공사설계의 변경」

2. 위와 관련 악천후(우천 및 기온강하)로 인한 청사외벽 및 옥외계단 도색작업을 업체의 요청에 따라 다음과 같이 일정변경하여 시행하고자 합니다.

가. 건    명 : 청사 외벽 및 옥외계단 도색작업

‑ 기존 일정 : 2014. 11.29.(토) ~ 12.03.(수) 5일간

‑ 변경 일정 : 12월중 0℃이상 기온회복시 작업

※ 변경일정 업체협의후 차후 서면통보 예정

나. 변경사유 :

‑ 행정안전부 예규 제437호 13장 공사계약 일반조건 제6절「공사설계의 변경」에 따른 공사일정 변경 (우천 및 기온강하)

다. 공정완료 :

· 청사외벽 120㎡ 면처리 및 수성페인트(색상표: KCI3452) 도색

· 옥외계단 50㎡ 바탕 녹제거 및 면처리 후 방수제 도포

라. 미완료 :

· 옥외계단 50㎡ 유성페인트(색상표: KCI3734) 도색 (미완료)

붙임   1. 일정연기신청서 1부,

2. 시방서 및 도면 1부.

3. 공사계약 일반 및 특수조건(압축파일) 1부.  끝.

.

★담당자	김선도		장비회계팀장	김상엽		소방행정과장	제홍근		소방서장	12/04 김재병
협조자
시행	소방행정과-15855	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76(신수동 100-5)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-712-6061	/전송	02-701-3491	/	2009072385@seoul.go.kr	/	부분공개