함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울특별시장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2014년 역촌동외 8개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2014년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회)을 시행하고 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : (주)보림프러스 대표 김병관

다. 공사기간 : 2014.04.21 ~ 2015.06.30

라.  계약 금액(도급액)                                      (단위:원)

구 분		총부기금액			비고
		당초	변경	증 감
총 공 사 비		709,724,421	709,724,421	-	-
도 급 비	금차	323,392,421	401,000,000	증 77,607,579	-
	총차	504,427,421	504,427,421	-
관급자재비		205,297,000	205,297,000	-	-

마. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증,감

바. 공사개요 : 별첨설계서 참조

사. 예산과목

자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비

상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(기타교체비)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비)

붙 임 : 1. 설계변경 방침서 및 내역서 1부.

2. 합의서 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	강병국		주무관	김기문		시설관리팀장	천성훈		시설관리과장	12/04 박길영
협조자	주무관	손인숙
시행	시설관리과-32362	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 홍제2동 38-69	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	rido011@seoul.go.kr	/	대시민공개