함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2014년 역촌동외 8개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2014년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(2회)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : (주)보림프러스 대표 김병관

다. 공사기간 : 2014.04.21 ~ 2015.06.30

라.  계약 금액(도급액)                                      (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공 사 비		709,724,421	709,724,421	0
도급액	금차	323,392,421	401,000,000	77,607,579
	총차	504,427,421	504,427,421	0
관급자재비		205,297,000	205,297,000	0

마. 설계변경사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증,․감

바. 최대이행금액 : 변동없음

사. 예산과목

자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비(흑PE관정비)

상수도사업비용, 영업비용, 급수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비(기타교체비)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비)

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 요약보고서 1부.

3. 변경합의서 1부. 끝.

주무관	강병국		시설관리팀장	천성훈		시설관리과장	박길영		서부수도사업소장	12/04 설동을
협조자	주무관	손인숙
시행	시설관리과-32264	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 홍제2동 38-69	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	rido011@seoul.go.kr	/	대시민공개