투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)	공사관리처 편의시설팀장
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 통보(지하철 승강편의서설(2단계) 2공구)

1. 도로보수과-6775(2014.11.29)호 및 서울메트로 공사관리처-948 (2014.12.3)호와 관련입니다.

2. 서울메트로에서 시행하고 있는 『지하철 승강편의시설 설치공사(2단계) 2공구』 원인자부담 공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니,

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

공사명	구분	설계사	감리사	시공사	공사기간 변경
					당초	변경
지하철 승강편의시설 설치공사(2단계)2공구 교통안전시설(노면표시) 설치공사	노면표시	대영유비텍㈜	대영유비텍㈜	원광산업	‘12.12.11 ~'14.11.30	‘12.12.11 ~ '15. 3. 6

나. 변경사유 : 각종 지장물 처리 지연에 따른 후속공정 지연.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	서울메트로사장,서울강남경찰서장(교통과장),강남구청장(교통정책과장),서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
주무관	김종섭		주무관	박일연		도로보수과장	전결 12/04 손수희
협조자
시행	도로보수과-7124	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0352	/전송	02-2040-0307	/	resta2002@seoul.go.kr	/	대시민공개