문서번호	생태공원과-2765
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
서은교		최병언	12/04 차광재
협조	주무관		이옥상
	주무관		양순옥

『양화한강공원 친수공간 조성공사』

실정보고사항 검토 보고(5회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

한강사업본부

(생태공원과)

『양화한강공원 친수공간 조성공사』

실정보고사항 검토 보고(5회)

『양화한강공원 친수공간 조성공사』시행중 공사감독부서인 시설관리공단의 실정검토 사항에 대하여 검토결과를 보고드림.

⇒ 공사감독3처-11978(2014.12.02)

공사개요

공 사 명 : 양화한강공원 친수공간 조성공사

공사기간 : 2013.12.27 ~ 2014.12.26

도 급 비 : 금차 2,575,760천원(총차 3,279,237천원)

도 급 자 : 태흥개발(주) 대표 신현종, 정나라건설(주) 대표 이완규

실정사항 검토결과

현장회의 검토내용

분야별	회 의 사 항	결 과 내 용	검토결과
구조물공	□ 물놀이장 수심별 마감재 색상 다르게 표시하고 색상변환부는 물결(파도)선으로 처리	□ 물놀이장 색상 결정시행 - FL7.0 : 색상번호 KCI-3725 - FL7.0~FL7.5 : 색상번호 KCI-3724 - FL7.5~FL7.8+1m : 색상번호 KCI-3723 동선구간 : 자연모래색 - 벽체는 바닥색상 연장하고 색변환부 물결 (파도)선 처리 ※ 도면참조	회의결과 내용반영
배 수 공	□ 물놀이장 스틸그레이팅은 발가락끼임 등 안전사고 우려되고 주차장 스틸그레이팅은 차량횡단시 소음발생 및 뒤틀림 예상	□ 물놀이장 스틸그레이팅은 디자인그레이팅으로 변경하고 주차장 횡단구간은 무소음그레이팅으로 설치 - U형측구(300*300) : 62m → 0m - U형측구(300*300,디자인그레이팅) : 0m → 69m - 무소음그레이팅(395*995*48T) : 0m → 33m	회의결과 내용반영

분야별	회 의 사 항	결 과 내 용	검토결과
철거공/ 포장공	□ 주차장 존치계획에 따라 신설과 기존포장과 연결부분 문제점 발생 1)투수잔디블록포장 주변 U형측구(h=9~8.7)와 자전거도로 및 주차장(h=8.95) 높이차이로 적정배수 및 구배확보 곤란 2)존치주차장(h=9.0)과 보행로포장(h=9.0)의 높이가 같아 안전한 보행여건을 위해 보행로포장 종방향 높이조정 필요 3)기존주차장(h=9.03)과 물놀이장(h=8.35)의 단차 및 연결거리부족으로 적정구배 곤란 4)시설유지관리를 위한 주차장과 화장실구간(No.4~5) 설치 연결도로가 단차 및 연결거리 부족으로 적정구배 곤란	□ 현장여건 및 이용시민 편의에 맞게 추가정비 시행 1) 기존자전거도로 및 주차장포장의 일정부분을 철거하고 U형측구까지 구배조정 시행 - 아스콘포장(복구) : 0 → 75㎡ - 아스콘기층 추가포장 : 0 → 67.5㎡ - 아스콘덧씌우기 : 0 → 393㎡ - 소형고압블록포장A(t=80,단차구간) : 0→662㎡ - 화단재설치 : 0 → 5개소 2) 보행로 접하는 주차장 일부포장 높이조정 - 소형고압블록포장A(t=80,단차구간) 662→1,547㎡ ※ 소형고압블럭(U형)은 관급 적기공급 곤란하여 사급처리 3) 물놀이장 연결로 구배를 장애인시설기준(8%이하)로 조정위해 보행로와 주차장 일부 낮춤구간 조정시행 4) 연결로 구배를 8%내로 조정하기 위해 경사구간을 화장실방향으로 연장하여 적정구배 확보시행 ※ 도면참조	회의결과 내용반영
부대공	□ 물놀이장 및 한강공원 이용시민 안전을 위해 턱낮춤구간 볼라드 설치하고, 주차장 차량출입구앞 자전거도로에 시인성포장 및 안전표지판 필요	□ 현장여건에 맞게 볼라드 및 시인성포장, 안전표지판 추가설치 - 미끄럼방지포장(적색) : 0 → 160㎡ - 볼라드설치 : 0 → 44개소 - 안전표지판설치 : 0 → 4개소	회의결과 내용반영
기타	□ 원활한 공사추진을 위하여 1,2차분 공종조정 시행	□ 현장여건 및 공정표에 맞게 추후 설계변경시 1,2차분 공종조정 시행	회의결과 내용반영

현장실정 검토내용

분야별	현 황	실정보고 내용	검토결과
구조물공	□ 제3회 실정보고시 밸런스탱크실에 시공코자했던 에폭시도막방수(T3㎜)는 유기용제 사용으로 유해물질 용출 우려됨	□ 상하수도협회 위생안전인증 받은 수용성 에폭시페인트 변경 시행 - 에폭시도막방수(바닥,노출3㎜) : 23.76→ 0㎡ - 에폭시도막방수(벽체,노출3㎜) : 133.84→ 0㎡ - 에폭시도막방수(천정,노출3㎜) : 16.56→ 0㎡ - 수용성 에폭시페인트(지하) : 0→ 174.16㎡	실정보고 내용반영

분야별	현 황	실정보고 내용	검토결과
포 장 공	□ 당초 인조화강석블록포장(차도용) 하부는 몰탈기층 시공계획 되어 있으나 블록자중 등으로 몰탈시공 곤란	□ 보도공사 설계시공 매뉴얼Ver1.0에 의거 블록포장하부 몰탈기층을 모래로 변경 시행 - 인조화강석블럭포장(차도용,200×200×T80) 1709→ 0㎡ - 인조화강석블럭포장(차도용,200×200×T80,모래기층) : 0 → 1,709㎡	실정보고 내용반영
	□ 주차장 전기, 상수도 관로 부설시 포장복구 등 물량 누락되어 있고, 일부 포장 침하구간 추가정비 필요	□ 현장여건에 맞게 포장복구 및 정비물량 조정 시행 - 소형고압블록포장B(t=80,차량이동구간) 0→ 390㎡ ※ 당초 차량구간 설계단면 적용 - 소형고압블록포장C(t=80,파손블록교체) 0→1,720㎡ - 소형고압블록포장D(t=80,침하구간) 0→1,025㎡ ※ 도면참조
배 수 공	□ 목재데크와 인조화강석블록 포장사이 녹지대구간에 별도 배수시설이 미반영되어 호우시 배수불량 우려됨	□ 현장여건에 맞게 목재데크와 녹지대 사이에 잔디수로 설치하고 집수정으로 유도배수 시행 - U형배수로(150×150) : 0→12m ※ 잔디수로 : 조경부분 시행	실정보고 내용반영
부 대 공	□ 주차장 정비구간 별도의 공사 안전시설물 미반영됨	□ 현장여건에 맞게 안전시설물 추가설치 - PE휀스 설치철거 : 0→364개소 - 가림막휀스 설치철거 : 0→38경간	실정보고 내용반영

개략공사비 변경내용(토목)

총차 공사비

(단위:천원)

구 분	당초금액 (도급금액)	변경금액			변경금액	비고
		전회	금회(증감)	계
합 계	2,055,468	-216,857	6,608	-210,249	1,845,219
제 경 비	649,968	-56,810	-2,911	-59,721	590,247
순공사비	1,405,500	-160,047	9,519	-150,528	1,254,972

1차 공사비

(단위:천원)

구 분	당초금액 (도급금액)	변경금액			변경금액	비고
		전회	금회(증감)	계
합 계	1,564,288	-143,828	-52,381	-196,209	1,368,079
제 경 비	499,831	-42,706	-15,009	-57,715	442,116
순공사비	1,064,457	-101,122	-37,372	-138,494	925,963

2차 공사비

(단위:천원)

구 분	당초금액 (도급금액)	변경금액			변경금액	비고
		전회	금회(증감)	계
합 계	491,180	-73,029	58,989	-14,040	477,140
제 경 비	150,137	-14,104	12,098	-2,006	148,131
순공사비	341,043	-58,925	46,891	-12,034	329,009

보고자 의견

실정보고사항 검토결과 그 내용이 타당하므로 공사감독부서로 실정검토내용과 같이 승인 통보하고 추후 설계변경시 물량 증·감 사항에 대해 정산처리하고자 함.

붙 임 : 시설관리공단 실정보고 관련문서 1부.  끝.