함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(오류동86~134번지간 송배수관 정비공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 시설관리공단에 공사감독 업무를 위탁한 『오류동86~134번지간 송배수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 오류동86~134번지간 송배수관 정비공사

나. 도 급 자 : (주)뉴코아스 대표 허복만

다. 계약기간 : 2014.7.18 ~ 2014.12.05

라. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(송배수관정비)

마. 설계변경 사유 : 시공물량 증감 및 신공종 발생

바. 설계변경내역                                           (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	284,005,700	258,060,000	감25,945,700

따로붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 서류 1부.

3. 설계변경 심의 결과서 1부.

4. 변경 합의서 1부

	강서수도사업소장
주무관	김승완		급수운영과장	전결 12/04 조면행
협조자	주무관	이상무
시행	급수운영과-29117	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	3146-3967	/전송	3146-3989	/	wan300@seoul.go.kr	/	대시민공개