문서번호	설비부-13741
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
김원태		김창균	12/04 박기형
협조

『동부간선도로확장(2공구) 전기공사(4차)』

준공기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

서울시도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『동부간선도로확장(2공구) 전기공사(4차)』

준공기한 연기 검토보고

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」 와 관련 감리단에서 4차공사에 대한 준공기한 연기원이 제출되어 검토하고 보고드림

관련근거

□ 동부2감-14-350(2014.12.03) : 전기공사(4차분)준공기한 연기원 제출

공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로확장(2공구) 전기공사(4차)

□ 공사규모 : 동부간선도로(녹천교~상계교) 3.2km 및 지하차도 전기설비

□ 공사기간 : 2008.12.29.~2015.12.30.(4차:2014.02.05～2014. 12.10)

□ 도 급 비 : 총차5,603,249천원(4차:10,000천원)

□ 시 공 사 : 태경이엘피(주) 대표 김평석

□ 감 리 사 : (주)이산

검토내용

□ 공사기간 연장사유

- 선행공정 지연에(창동진출우회도로 토목공사) 따른 전기공사(4차)

준공기한 연장

□ 공사기간 조정

구 분	당 초	변 경	비 고
전기(4차)	2014. 02. 05. ~ 2014. 12. 10	2014. 02. 05. ~ 2014. 12. 31	21일 연장

□ 연기사유 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

보고자 의견

□ 창동진출 우회도로의 사면정리가 지연되고있어 선행공정에 맞춰 전기공사(4차)의 준공기한을 2014. 12. 31일로 연장조치코자 함.

따로붙임 1. 감리단 준공기한 연기원 제출공문.  1부.

2. 공정표 및 연기합의서 각 1부.   끝.