함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사 설계변경(최종) 시행

1. 시설관리과-24916(2014.11.27.)호 및 재무회계과-15708 (2014.12.04.)호 관련입니다.

2. 우리사업소『강서구청사거리~발산역(공항대로) 송배수관 정비공사』설계 변경을 위한 사업소 자체 타당성 검토와 본부 심의를 마치고, 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행코자 합니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 강서구청사거리 ~ 발산역(공항대로) 송배수관 정비공사

2) 공사기간 : 2014. 5. 1.~ 2014.12.10.

3) 규    모 : D80~D800㎜, L=1,460m 강관용접 및 주철관 접합시공(야간)

4) 계약업체 : 안일건설 대표 유미정

나. 설계변경 사유 : 공사현장 여건변동으로 인한 신규공종 및 물량 증감

다. 예산과목 : 구축물, (송배수관정비), 시설비및부대비(시설비)

라. 설계변경내역

(단위, 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
총 공 사 비	2,000,000,000	2,118,572,000	증) 118,572,000
도 급 비	708,991,790	895,609,000	증) 186,617,210
관급자재비	530,195,898	565,620,000	증) 35,424,102
복구비 및 기타	760,812,312	657,343,000	감) 103,469,312

붙임 : 1. 본부(재무회계과) 설계변경 심의결과 2부.

2. 사업소 자체 심의위원회 개최결과 보고 1부.

3. 설계변경도서(zip) 1부.

4. 제비율 검증 1부.  끝.

주무관	김근용		시설관리팀장	최양주		시설관리과장	이자원		강서수도사업소장	12/04 이상래
협조자	주무관	류태현		주무관	김유진		행정관리팀장	김경식
시행	시설관리과-25708	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4014	/전송	02-3146-4039	/	kkk-up@seoul.go.kr	/	대시민공개