투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사 기간연장 승인통보(합정역, 을지로4가역)

1. 항상 시정 발전에 협조하여 주시는 귀 청(사)에 감사드립니다.

2. 도로보수과-5346(2013.05.22.), 6014(2013.06.10.), 서울메트로  공사관리처-950(2014.12.03) 호와 관련, 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사 공사기간 연장요청에 대하여 아래와 같이 기간연장 승인 통보하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며 관련 부서에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 지하철 승강편의시설 설치공사(합정역, 을지로4가역)

나. 규제승인 : 서울지방경찰청 교통관리과-20960(2012.06.20)

서울지방경찰청 교통관리과-20224(2012.06.14)

다. 위    치 : 마포구 서교동 392-35 합정역 2번출구 주변

중구 남대문로2가 250 을지로4가역 9번출구 주변

라. 변경내역

구 분	관 련 업 체			공 사 기 간		원인자	비 고
	설 계	감 리	시 공	당 초	변 경
노면 표시	㈜대영유비텍	㈜대영유비텍	원광산업	2013.05.22 ~ 2014.11.30	2013.05.22 ~ 2014.12.30	서울메트로

마. 연기사유 : 각종 지장물 처리 지연으로 인한 공사기간 변경.

※ 공사 준공시 T-GIS(2013-0207-007, 2013-0207-012)에 사전 입력되어야 준공이 가능함을 알려드리며, 원인자는 준공요청시 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항을 참조하여 요청하시기 바랍니다.

붙 임 : 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 1부.    끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울중부경찰서장(교통과장),서울마포경찰서장(교통과장),서울메트로사장
주무관	권세봉		도로보수과장	12/04 이규철
협조자	주무관	이상하
시행	도로보수과-10857	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203(상암동 825번지)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8354	/전송	300-8364	/	se1212@seoul.go.kr	/	대시민공개