문서번호	시설보수과-4525
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
이경수		박춘배	12/04 代홍영두
협조
	주무관		최태석

설계변경 검토보고

(청계천복개구조물보수공사)

2014. 12

성동도로사업소

(시설보수과)

『청계천복개구조물보수공사』

설계변경 검토 보고

우리 사업소에서 시행 중에 있는 『청계천복개구조물보수공사』의 시공물량 증․감에 따라  설계변경 시행하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ

공사개요

공 사 명 : 청계천복개구조물보수공사

공사기간 : 2014. 06. 12 ~ 2014. 12. 08

사업개요 : ○ 콘크리트 단면보수       A=431㎡

○ 콘크리트 표면보수       A=1,296㎡

○ 콘크리트 균열보수       L=326m

도 급 액 : 금245,088천원

도 급 자 : ㈜킹대일  대표 이승호

Ⅱ

보고내용

설계변경 사유

▶ 시공물량 증․감에 따른 변경

▶ 임시전력 사용에 따른 한전표준시설부담금 및 전기요금 납부고지서 정산 등

주요 공종 물량 증․감 내역

공 종	규 격	단위	수 량			비고
			당초	변경	증․감
균열 보수	0.3mm	m	326	236	감) 90
단면 보수	10~30mm	㎡	431	463	증) 32
표면 보수	hi-fer	㎡	1,296	2,296	증) 1,000
임시전력수용	한전표준시설부담금	개소		2	증) 2
전기요금	4개월	식		1	증) 1

공사비 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총공사비		247,968,000	241,360,000	감) 6,608,000
도급비	계	245,088,000	241,360,000	감) 3,728,000
	공급가액	222,807,274	219,418,183	감) 3,389,091
	부가가치세	22,280,726	21,941,817	감) 338,909
관급자재비		1,340,400	-	감) 1,340,400
이전비		1,539,600	-	감) 1,539,600

예산과목

▶ 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 청계천복개구조물, 시설비및부대비, 시설비

Ⅲ

조치의견

상기 내용과 같이 시공물량 증감 및 신규 공종 발생에 따라 청계천복개구조물보수공사의 설계변경 후 준공처리 코자합니다.

붙임 : 설계변경서 1부.  끝