문서번호	도시철도설비부-11179
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
이재구		강재천	12/04 정찬웅
협 조
	송변전과장			김형기
	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			윤승범
	정보통신과장			이용기
	신호과장			김영하

4/4분기 지하철 건설공사

설비분야 품질관리 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  12.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

4/4분기 지하철 건설공사

설비분야 품질관리 점검계획

지하철 9호선2단계와 우이-신설1공구 설비분야 공사 진행사항과 현장시공 상태에 대한 점검을 실시하여 시공품질 향상에 만전을 기하고자 함

	관련근거

1

○ 건설기술진흥법 제55조(건설공사의 품질관리)

○ 건설기술진흥법 시행령 제92조(품질관리의 지도･감독 등)

○ 건설기술진흥법 시행규칙 제52조(품질관리의 적절성 확인)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제16조(감독)

	점검계획

2

□ 점검기간

○ 2014. 12. 8(월)~12. 19(금)

□ 점검대상

○ 9호선2단계 건설공사

- 서울지하철 9호선2단계 915~917공구 건설공사(기계, 전기분야)

- 서울지하철 9호선2단계 신호보안설비 공사

- 서울지하철 9호선2단계 정보통신설비 공사

- 서울지하철 9호선2단계 송변전․전차선 공사

○ 우이-신설 경전철 건설공사(현재 진행중인 설비분야 공사)

- 우이-신설 경전철 차량기지(기계, 전기분야)

※ 우이-신설 경전철 1~13정거장은 설비분야 미착공

□ 점검분야

○ 송변전･전차선, 전기, 설비, 통신, 신호

(차량분야 제외 : 도시철도법에 따라 한국철도기술연구원 주관 성능시험)

□ 점검반 편성

○ 9호선 2단계 : 서울메트로(9호선 운영사업소)와 합동점검

○ 우이-신설 : 분야별 담당과장 및 담당, 민간투자사업 시행사 담당자

○ 감리원 및 건설기술자는 점검시 입회

※ 점검반 편성 검토

○ 2014년 12월 현재 9호선2단계 추진공정

분야별	송변전･전차선	전기	기계	정보통신	신호
공정율	100%	95~96%	93~95%	100%	100%

- 9호선 2단계 공정이 마무리 단계이며, 운영사 서울메트로에서 현장 점검을하고 있으므로 서울메트로와 합동점검

○ 2014년 12월 현재 우이-신설 추진공정

- 1공구 차량기지 내 기계설비, 전기 공사 진행중

- 우이-신설 경전철은 추진 공정율이 낮으므로 자체 점검

□ 점검방법

○ 각 분야별 담당과장 책임하에 점검

○ 분야별 품질관리상태 및 시공의 적정성 여부, 안전관리 등 중점점검

○ 품질관리실태점검표(별첨)에 관리상태 및 시행적정성 등 확인

○ 공사 진행에 지장이 없도록 동일 현장은 가급적 각 분야 동시점검

□ 중점 점검사항

○ 준공 대비 품질관리 상태 중점 점검

○ 관련규정에 따른 기술지도, 교육사항

○ 품질관리 및 안전관리 계획 준수여부

○ 각종 장비 및 자재 관리상태

○ 시공 및 가동의 적정성 여부

○ 공정관리 실태 및 품질향상을 위한 시공방법 개선 등 조치사항

○ 기타 시민불편사항, 수범사례 등

○ 3/4분기 점검 지적사항 조치결과

	점검결과 조치

3

○ 시공품질관리 상태 등 부적합 사항

- 현지시정 및 감리단에 통보하여 시정 후 보고 하도록 조치

- 부실시공, 품질관리 부적정 등 지적사례는 재발방지를 위해 각 현장에 전파 및 향후 참고 자료로 활용

- 우이-신설 도시철도 민간투자사업은 우이-신설 경전철㈜에 통보

○ 지적사항은 분야별 공사관리관이 지속적 관리

- 각 공구별 지적사항 관리 및 시정여부 확인 조치

○ 점검결과 제출(설비계획과 수합)

- 각 과에서는 점검표 및 점검결과 보고서를 ‘14.12.22(월)까지 제출

- 점검결과 지적사항에 대한 근거자료 및 사진 첨부

별첨 : 1. 품질관리 실태 점검표(점검자 작성용) 1부.

2. 품질관리 실태 점검결과 보고서(감리단･시공사 작성용) 1부. 끝.