투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	전면책임감리용역 설계변경 및 용역기간(변경) 연기의뢰

1. 우리 본부에서 시행중인 「위례신도시 차집관로 증설사업 전면책임감리용역」에 대한 설계변경 및 용역기간(변경) 연기를 다음와 같이 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 위례신도시 차집관로 증설사업 전면책임감리용역

나. 용역규모 : 차집관로 부설 D=700~1,100㎜, L=4,412m

다. 용 역 비 : 598,630천원

라. 용역기간 : 2013.12.16.~2014.12.15

마. 도급업체 : (주)수성엔지닌어링 외 1

바. 예산과목 : 세입세출외 현금(SH공사 예산)

사. 설계변경내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
용역금액	598,630	661,700	증)63,070
용역기간	2013.12.16∼2014.12.15	2013.12.16∼2015.6.30	증)6.5개월

아. 변경사유 : 수방기간 공사중지 등에 따른 설계변경(감리원 배치조정)

및 용역기간 변경.

첨부 : 1. 합의각서 1 부.

2. 설계변경 방침서 1 부.

3. 설계변경 내역서 1 부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	서관석		방재시설부장	12/04 임춘근
협조자	주무관	장수철		계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-12744	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개