투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(전체7회) 시행 및 4차공사 계약 의뢰

1. 우리부에서 장기계속사업으로 시행중인 『마곡지구내 재생수공급시설 설치공사』에 대하여 아래와 같이 전체7회 설계변경 및 4차공사 계약을 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사

나. 도 급 비 : 전체 6,803백만원

다. 공사기간 :  전체 2011. 11. 01 ∼ 2016. 07. 31

라. 도 급 자 : 유호산업개발(주)

마. 설계변경(전체7회)

1) 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
도 급 비	6,803,140,000	7,054,040,000	증 250,900,000
공사기간	2011. 11. 01 ∼ 2016. 07. 31	좌동	변경없음

2) 변경사유 : 수목 추가식재 실정보고 승인사항 반영

바. 공사발주(4차)

1) 공 사 명 : 마곡지구내 재생수공급시설 설치공사(4차)

2) 발주내역

(단위 : 원)

구 분	전 체	기계약	4차	장 래
도 급 비	7,054,040,000	5,384,843,510	1,669,196,490	-
공사기간	2011. 11. 01 ∼ 2016. 07. 31	2011. 11. 01 ∼ 2014. 06. 16	2014. 12. 08 ∼ 2015. 12. 31	-

사. 예산과목 : 하수도사업특별회계, 도시안전실 물관리정책과, 물재생시설개선 및 관리, 물재생시설개선, 마곡지구내 재생수공급시설 설치공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1) 설계변경 보고서 1부.

2) 책임감리원 검토의견서 1부.

3) 설계변경(전체7회) 내역서 및 4차발주 내역서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김상용		방재시설과장	서관석		환경설비과장	이달영		방재시설부장	12/04 임춘근
협조자	주무관	임성은		★계약1팀장	김점선		조경시설과장	신용우
시행	방재시설부-12737	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02)3708-8782	/전송	02)3708-8756	/	kimsy2405@seoul.go.kr	/	대시민공개