문서번호	건축부-14552
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
신현성		양기정	12/04 김우성
협조

『강남순환도로 민간투자사업 건설공사』

책임감리 감리원 투입 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부 건축부

『강남순환도로 민간투자사업 건설공사』

책임감리 감리원 투입 변경 보고

강남순환도로 민간투자사업 건설공사와 관련 책임감리자로 부터  감리원 투입변경 보고가 있어 변경 내용을 보고

1		용역개요

○ 용  역  명 : 강남순환도로 민간투자사업 건설공사 책임감리용역

○ 건축감리기간 : 2014.07.21~2015.12.31

○ 계  약  자 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소

2		추진경위

○ 2014. 07. 21 : 책임감리용역 건축감리 투입

○ 2014. 05. 13 : 서울재정지원금 으로 인한 2016. 5. 19 으로 사업기간연장

○ 2014. 11. 19 : 건축감리원 투입기간 조정 요청

3		감리 투입 기간 변경

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감	비고
감리용역기간	2014.07.21. ~ 2015.12.31	2014.07.21. ~ 2016.05.31	9개월

4		검토 및 처리의견

○ 계약변경으로 인한 금액 증액분에 대한 최종결정은 민자사업 총괄부서인 토목부

에서 처리하여야 하므로 내용 통지

붙임  감리원 투입 조정 요청 관련 서류.  끝.