함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(가산초등학교외 12개소 아리수 직결음수대 설치 및 교체공사)

우리사업소에서 시행중인 『가산초등학교외 12개소 아리수 직결음수대 설치 및

교체공사』 에 대하여 설계변경 시행하고 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 가산초등학교외 12개소 아리수 직결음수대 설치 및 교체공사

나. 도 급 자 : ㈜주흥건영  대표 김주문

다. 계약기간 : 2014.09.30. ~ 2014.12.04.

라. 설계변경 사유 : 시공물량 증ㆍ감 및 신규공종 발생

마. 설계변경금액                                        (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감액	비 고
도 급 액	18,360,300	20,080,000	증 1,719,700

바. 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비,지원사업성시설비(음수대)

붙 임 : 1. 설계변경 시행 1부(보고서 및 설계변경 내역서 포함)

2. 설계변경 심의서 및 합의서 각1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	최선보		주무관	代정헌석		급수운영과장	12/04 장시명
협조자
시행	급수운영과-26198	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방동)	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/	csb8601@seoul.go.kr	/	대시민공개