문서번호	토목부-23986
결재일자	2014.12.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	광역도로과장	토목부장	시설국장
이한규	최광무	노우성	12/04 이광세

- 선사로~고덕지구간 도로 확장공사외 1개소 전면책임감리용역 - 준공기한 연기 및 설계변경 검토보고

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

- 선사로~고덕지구간 도로 확장공사외 1개소 전면책임감리용역 -

준공기한 연기 및 설계변경 검토보고

도로 확장(2 → 4∼6차로)을 위한 용지보상 및 문화재발굴조사가 지연되어 시설공사 기간 연기(2015.12.31)에 따른 전면책임감리용역 준공기한 연기 및 설계변경을 검토 보고하는 사항임

□ 관련근거

○ 중앙토지수용위원회 판결(‘14. 6.27.)

○ 토지손실보상 완료(‘14. 8.12.)

○ 문화재조사 발굴 변경허가(문화재청 발굴제도과-11169호, ‘14.11.12.)

○ 문화재조사 부분 완료 및 정밀발굴조사 변경 승인

(문화재청 발굴제도과-11986호, ‘14.11.27.)

○ 시설공사 준공기한 연기 검토보고(토목부-23807호 ‘14.12. 2.)

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사외 1개소 전면책임감리용역

○ 규    모 : 아리수로 도로확장 폭 2차로 → 4~6차로, 연장 3.72㎞,

○ 용역기간 : 2009. 3.16. ~ 2014.12.31.

○ 계약금액 : 3,227,722천원

○ 용 역 사 : 한국건설관리공사, ㈜경화엔지니어링

□ 준공기한 연기

○ 연기사유(총차)

- 도로 확장(2 → 4∼6차로)을 위한 용지보상 및 문화재발굴조사 지연되어 시설공사기간 연기(2015.12.31.)에 따른 전면책임감리용역 기간 연장

○ 준공기한 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
전 체	2009. 3.16 ~ 2014.12.31	2009. 3.16 ~ 2015.12.31	연장 12개월

□ 설계 변경보고

○ 설계변경 사유

- 도로 확장(2 → 4∼6차로)을 위한 용지보상 및 문화재발굴조사 지연되어 시설공사 기한 연기(2015.12.31)에 따라 감리기간 연장을 위한 설계변경 사항임

○ 설계변경 내역

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
전 체	3,227,722	3,867,000	증)639,278

□ 조치 계획

○ 공사기간 연기에 따른 전면책임감리용역 준공기한 및 설계변경(전체, 8회)하여 공사 시행에 만전을 기하고자 함.

○ 연기에 따른 귀책 소재 : 도급자에 있지 않음.

○ 지체상금부과 여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기 및 설계변경 의뢰서 1부.

2. 시설공사 준공기한 연기 검토보고(총차 및 6차, 7차공사) 1부.

3. 예정공정표1 부.

4. 설계변경 내역서 1부.  끝.