문서번호	방재시설부-12794
결재일자	2014.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		공원시설과장	방재시설부장
전지홍		정일환	12/05 임춘근
협조
	주무관		강종희

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」

폐기물처리용역 설계변경(1차 2회) 검토보고

2014. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「경춘선 폐선부지 공원조성공사」

폐기물처리용역 설계변경(1차 2회) 검토보고

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)』1차분에 대해 공기연장 추진하여 원활한 폐기물처리 시행코자함

▶ 경의경춘(감)-940(2014.12.4)호 관련

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계) 건설폐기물 처리용역

○ 용역개요 : 건설폐기물 처리(폐콘크리트 5,437톤 등)

○ 용역기간 : ’13. 12. 13  ~ ’15. 3. 7

(※ 1차 : ‘13. 12. 13  ~  ‘14. 12. 12)

○ 용 역 비 : 금298,800천원 (1차 금298,800천원)

○ 용 역 사 : 정일산업(주) & ㈜대성에코

□ 감리원 보고내용

○ 변경사유

- 2014년 12월 현재, 계약된 건설폐기물 수량의 약 95%가 처리완료 되었으며 시일 내에 잔여수량도 처리 완료될 예정이나,

- 본 공사 완료 예정일까지 추가 발생 가능한 현장 폐기물에 대한 원활한 처리와 정산 설계변경(본공사 발생 폐기물 수량확정) 기간을 고려하여 총차 계약기간까지 연장코자함

○ 변경내용

구 분		당 초	변 경	비 고
용역 기간	전 체	2013.12.13 ~ 2015.3.7	변경없음
	금 회 (1차)	2013.12.13 ~ 2014.12.12	2013.12.13 ~ 2015.3.7	용역기간 85일 연장
용역 금액	전 체	298,800,000원	변경없음
	금 회 (1차)	298,800,000원	변경없음

○ 감리원 의견

- 상기와 같이 “경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계) 건설폐기물 처리용역” 금회1차 용역기간 연장에 대하여 검토한 결과 잔여 수량이 소량이고,

- 본 공사 1차공사 완료 예정일까지 발생 가능한 현장 건설폐기물의 원활한 처리 및 본공사 정산설계변경 기간을 고려할 때 총차 계약기간까지 연장함이 적정하다고 판단됨.

□ 검토의견

○ 감리단에서 제출한 폐기물처리용역 설계변경 내용을 검토한 바 적정한 것으로 판단되므로 설계변경(1차 2회) 시행하여 발생폐기물 처리에 만전을 기하고자 함

붙임 :  감리 검토보고서 1부.  끝.