투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기 요청 (강남터미널고가 보수공사(4차))

1. 우리사업소에서 시행중인 “강남터미널고가 보수공사(4차)” 의 준공기한을 아래와 같이 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 공사현황

공 사 명	공 사 개 요	공사기간	계약금액(원)	계 약 자
강남터미널고가 보수공사(4차)	방호벽 재설치 1,013m 신축이음교체 28.8m 등	2014.6.11 ~ 2014.12.7	1,157,031,300	예신건설(주) 대표 이혜경

나. 준공기한 연기

- 당 초 : 2014. 12. 7

- 변 경 : 2014. 12. 22

다. 귀책사유 : 서울특별시 남부도로사업소

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	장창원		주무관	금종융		시설보수과장	전결 12/05 김찬구
협조자
시행	시설보수과-5026	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 대림동 도림로 145 (대림동711)	/
전화	32845465	/전송	8363093	/		/	대시민공개